문서번호	도시철도토목부-15650
결재일자	2017.12.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조규양		최진규	12/01 김진팔
협조
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

H1정거장 구간 현안사항 검토

2017. 12.

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

H1정거장 구간 현안사항 검토

『하남선(5호선 연장) 11공구 건설공사』비개착정거장(NTR)구간 외부전문가 자문 관련 건설사업관리단의 토압지지대, 철망거푸집 설치 등 실정보고에 따른 검토 보고임.

※ 관련문서 : 하남 제17-1057호(2017.11.27.)

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사규모 : 총 연장 628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

○ 공사기간 : 2015.05.30.~2019.03.28.

○ 도 급 액 : 71,409백만원

○ 도 급 자 : 한신공영(주)외 1개사

○ 관 리 사 : ㈜동일기술공사 외 5개사

2		추진경위

○ ’17.02.28. : NTR구간 절단부 가시설 용접이음 계획 제출 지시(본부 ⇒ 관리단)

○ ’17.03.16. : 절단부 가시설 보강 원설계자 의견 제출(원설계자 ⇒ 관리단)

○ ’17.05.05. : 외부전문가 특별합동점검

○ ’17.05.08. : 외부전문가 특별합동점검 결과 조치계획 제출 요청(본부 ⇒ 관리단)

○ ’17.05.18. : 특별합동점검 결과 조치계획 보고(관리단 ⇒ 본부)

3		실정보고 내용

【 비개착정거장(NTR) 외부전문가 자문의견 】

① 강관 라이닝 시공 : 라이닝 분할시공에 따른 시공이음부 리브라스 설치(6개소, 64.5m)

검 토 내 용	라이닝 분할 타설계획	철망 거푸집 설치 상세
철망거푸집 : 시공이음부 6개소(64.5m), 강관전면부 설치 거푸집 지지대 : 강관 상.하단 각 2개소
3~5번 측면 철망거푸집	12번관 측면 철망거푸집	서포트 설치

② 방수철판 상.하부 그라우팅

검 토 내 용	당 초	변 경
외부그라우팅 수량 오류 정정 : 감 2㎥ (312㎥→310㎥) 하부그라우팅 주입 : 증 138㎥
	하부그라우팅 주입	고정철판 절단

③ 임시 토압지지대 설치 : 콘크리트라이닝 타설 전 강관 안전을 위한 임시 토압지지대 설치

검 토 내 용	임시 토압지지대 설치
CON’C 1차타설부(4개소) : 고정 설치 (64.5m) 2,3차 타설부(8개소) :이동설치

④ NTR구간 마감벽 절단 가시설 안정성 검토

⇒ 강관압입에 저촉되는 시종점부 마감벽 가시설은 절단하여 강관 압입이 완료된 후 파일을 원상복구하는 것으로 계획되었으나, 절단된 가시설을 강관 외측에 용접이음 하는 것이 안전성, 시공성, 공정관리에 유리함

※ 원설계자 의견 : 강관 외측에 용접하는 방안은 안전한 것으로 검토되었으며, 강관의 변형 등을 방지하기 위하여 강관 내부에 강관링(t=18㎜) 보강 필요

검 토 내 용	강관 보강(변경전)	강관 보강(변경후)
절단 가시설 용접보강(26개소) 강관링(t=18㎜) 내부보강(26개소)
	보 강 전	보 강 후

【 수량 증·감 현황 】

구 분	단위	수 량		증 · 감	비 고
		당 초	변 경
그라우팅 주입	㎥	588	724	136	외부(감2㎥) 하부(증138㎥)
임시토압지지대	EA	-	504	504	H-100×100×6×8, C.T.C. 3m, 평균길이 1.85m
철망거푸집 설치	㎡	-	287	287
마감벽 절단 가시설 보강	개소	-	26	26

【 공사비 변경내용 】

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
강관추진공	161,224	198,516	증37,292
강관보강공	-	59,754	증59,754
마감벽 절단 가시설 보강	-	28,663	증28,663
직접공사비	161,224	286,933	증125,708
제경비	71,776	123,067	증51,291
합 계	233,000	410,000	증177,000

4		건설사업관리단 검토의견

○ 비개착정거장(NTR)구간 안정성 확보를 위한 외부전문가 자문의견에 따른 임시 토압지지대 및 철망거푸집 설치, 방수철판 하부그라우팅 추가 반영

○ NTR 강관구간 마감벽 절단 가시설(측벽파일, 띠장) 안정성 검토에 따른 강관 단부 추가보강 등에 대한 실정보고 검토로서,

○ 수량, 단가 검토결과 적정한 것으로 판단되며, 변경된 공사비(증177,000천원)에 대하여는 설계변경 심의를 거쳐 추후 설계에 반영함이 타당할 것으로 판단됨.

5		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 서울외곽순환고속도로 하부 비개착정거장(NTR)구간 외부전문가 자문의견에 따른 실정보고 건에 대하여는 안전시공 및 원활한 공정추진을 위하여 건설사업관리단 검토의견과 같이 승인하고,

- 공사비 증액 : 117,000천원

○ 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 설계변경시 정산 반영하고자 함

붙 임 : 관리단 공문 및 검토의견서 1부.