문서번호	도시철도토목부-16415
결재일자	2017.12.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조규양		최진규	12/15 代호경수
협조
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

계약금액 변경 검토(총괄4회, 3차1회)

2017. 12.

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

계약금액 변경 검토(총괄4회, 3차1회)

『하남선(5호선 연장) 11공구 건설공사』관련 건설사업관리단으로부터 제출된 계약금액 변경(총괄4회, 3차1회)에 대한 검토 보고임.

○ 총괄 4회 : (당초)77,377백만원 ⇒ (변경)82,759백만원 [증5,382백만원]

○3 차 1회 : 계약금액 변경없음

※ 관련문서 : 동일(철도감) 제17-3480호(2017.12.13.)

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사규모 : 총 연장 628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

○ 공사기간 : 2015.03.30.~2019.03.28.

○ 계약금액 : 71,409백만원

○ 계 약 자 : 한신공영(주) 외 1개사 / 감리사 : (주)동일기술공사 외 5개사

○ 계약현황

[단위 : 백만원]

구 분	총 괄	1∼2차(준공)	3차(금회)	향 후
계약금액	71,409	19,677	11,500	40,232
공사기간	`15.03.30 ~`19.03.28	`15.03.30 ~`17.06.07	`17.06.08 ~`17.12.31	-

2		설계변경 현황

○ 계약금액 조정현황

[단위 : 백만원]

구 분	총괄 4회		증 · 감	3차 1회		증 · 감
	당 초	변 경		당 초	변 경
총 공사비	77,377	82,759	(증)5,382	12,223	12,223	-
도급공사비	71,409	76,887	(증)5,478	11,500	11,500	-
관급자재비	5,968	5,872	(감)96	723	723	-

○ 수량 및 공사비 증·감

- 총괄 4회 변경

[단위 : 백만원]

구 분	당 초		변 경		증 · 감
	내 용	공사비	내 용	공사비
가설공	가설울타리 : 1,835m	1,940	가설울타리 : 1,711m	1,865	감)75
본선1	운반거리 25.04km(25,338㎥) 천공 및 항타 : 3,212m	5,786	운반거리 25.04km(4,140㎥) 40.38km(25,300㎥)	6,303	증)517
본선2	가벽4개소	2,140	가벽2개소, 커플러설치 1,066ea, 다웰바 244개소	2,128	감)12
본선3	구조물 : 52.85m(1,465㎥ 타설)	1,524	-	-	감)1,524
본선터널	굴 착 : 8,611㎥ 숏크리트 타설 : 779㎥	2,909	굴 착 : 12,650㎥ 숏크리트 타설 : 1,387㎥	4,524	증)1,615
정거장	운반거리 25.04km : 77,986㎥ 구조물 : 103.5m(18,354㎥ 타설)	13,600	운반거리 25.04km~40.38km : 77,986㎥ 구조물 : 103.5m(18,354㎥ 타설)	13,762	증)162
NTR	D2300mm,18t, L=64.5m 그라우팅주입 588㎥	6,706	D2300mm,18t, L=64.5m 그라우팅주입 724㎥ 임시토압지지대 16.037ton	6,954	증)248
환기구#1	굴 착 : 13,655㎥ 천공 및 항타 : 93본 어스앵커 4공	1,963	굴 착 : 13,864㎥ 천공 및 항타 : 106본 토류벽콘크리트 242㎡ 어스앵커 12공	2,137	증)174
환기구#2	굴 착 : 13,358㎥ 잔토처리 : 9,695㎥ 운반거리 21.14km~25.04km : 9,695㎥	1,963	굴 착 : 13,376㎥ 잔토처리 : 10,325㎥ 운반거리 21.14km~25.04km : 9,695㎥	2,003	증)40
고덕천교	거더제작 및 가설 : 26본	2,327	거더제작 및 가설 : 26본 탄성고무패드 192㎡ PHC말뚝 자재비 68ea	2,378	증)51
이설비	오수관 철거 및 신설 : 110m	662	오수관 철거 및 신설 : 110m 소화전이설 4개소	707	증)45
기 타	외부출입구, 입출고선, 도로복구, 조경공사, 건축·기계·설비공사	11,309	외부출입구, 입출고선, 도로복구, 조경공사, 건축·기계·설비공사	11,309	-
제경비	간접노무비외 1식	17,560	간접노무비외 1식	18,008	증)448
물가변동		-	1, 2회	3,413	증)3,413
제요율 제외공종 및 PS		1,040	기존5호선 가시설 변경 설계 및 암매각	1,416	증)376
도급금액		71,409		76,887	증)5,478

- 3차 1회 변경

[단위 : 백만원]

구 분	당 초		변 경		증 · 감
	내 용	공사비	내 용	공사비
가설공	가설울타리 : 440m 공사중 교통처리 안전시설 : 110EA	450	가설울타리 : 40m 공사중 교통처리 안전시설 : 30EA	229	감)221
본선1	잔토처리(토사) : 20,403㎥	1,444	잔토처리(토사) : 25,355㎥ 바닥 방수 460㎡	1,806	증)362
본선2	토공굴착 및 상차 : 3,745㎥ 띠장 : 593m 토류판설치 : 217㎡ 어스앵커 : 34공	150	토공굴착 및 상차 : 2,995㎥ 띠장 : 26m	45	감)105
본선터널	본선락볼트설치 : 728ea 라이닝콘크리트 타설 : 1,186㎥	1,208	본선락볼트설치 : 1,174ea 인버트콘크리트 타설 : 545㎥	1,123	감)85
정거장	토류판설치 : 1,527㎡	4,707	토류판설치 : 1,500㎡ Con’c 타설 : 883 ㎥	4,763	증)56
환기구#1	토공굴착 및 상차 : 13,655㎥ 주형보설치 : 71본 복공판설치 : 1,049㎡	831	토공굴착 및 상차 : 6,914㎥ 주형보설치 : 36본 복공판설치 : 809㎡	366	감)465
환기구#2	잔토처리(풍화암,연암) : 611㎥	64	잔토처리(풍화암,연암) : 1,241㎥	110	증)46
고덕천교	가도 및 축도 설치 : 5,519㎥ 조립식 PC BOX설치 116m	25	가도 및 축도 설치 : 2,760㎥ 탄성 고무패드 설치	26	증)1
이설비	교통신호등 및 가로등 이설 외	69	교통신호등 및 가로등 이설 외	19	감)50
직접공사비		8,948		8,487	감)461
제 경 비	간접노무비 및 보험료외	2,994	간접노무비 및 보험료외	2,687	감)307
물가변동			1회, 2회	343	증)343
제요율 제외 및 PS	계측정보 산학협동 연구비 외 현장발생암 매각 : 96,399㎥	-442	계측정보 산학협동 연구비 외 현장발생암 매각 :15,357㎥	-17	증)425
도급금액		11,500		11,500	-

○ 변경내역(총괄)

[단위 : 백만원]

연번	건 명	도 급 비			비고
		당 초	변 경	증 감
계		12,222	17,700	증5,478
1	대한연세요양원 자동화 계측기 설치	-	9	증)9
2	본선2구간(고덕천)가벽 다웰바 및 탄성고무패드설치	105	93	감)12
3	본선1구간 사토장 추가 선정	413	633	증)220
4	비개착터널(NTR)구간 변경 설계비	-	30	증)30
5	고덕천구간 상수도이설	65	100	증)35
6	교통처리대책비(변경)	-	35	증)35
7	암판정결과보고(환기구#2)	471	511	증)40
8	암판정결과보고(본선터널)	3,314	3,330	증)16
9	본선3구간 공법변경(개착→터널)	4,996	5,143	증)147
10	비개착터널(NTR)구간 커플러 및 철근변경	1,671	1,718	증)47
11	본선2구간(고덕천)기둥 커플러설치	-	13	증)13
12	현장발생암 풍화암 반출 변경	593	1,128	증)535
13	비개착터널(NTR)외부전문가 합동점검결과 반영	233	407	증)174
14	환기구#1 덕트위치 변경설계	-	28	증)28
15	본선1구간 가시설 변경설계	-	20	증)20
16	본선터널 흄관(유공관)사급 전환	-	7	증)7
17	고덕천교(P1)PHC말뚝 사급 전환	1	32	증)31
18	고덕천교(A1,A2)강관말뚝 강종변경	-	-	-
19	본선1구간 중앙파일 천공 토질 변경	142	169	증)27
20	본선1구간 지장폐기물처리	24	344	증)320
21	유관기관 협의에 따른 소화전이설	-	35	증)35
22	본선1구간 철도운행안전관리자 배치	-	88	증)88
23	서울외곽순환고속도로 표지판설치	-	9	증)9
24	NTR 강관압입 본당길이 변경 및 중앙파일 보강	194	285	증)91
25	본선터널 및 환기구#2 암판정 결과반영, 풍화암 반출, 물가변동 변경	-	120	증)120
26	물가변동 1회	-	1,656	증)1,656
27	물가변동 2회	-	1,757	증)1,757

4		건설사업관리단 검토의견

○ 총괄4회 설계변경에 따른 계약금액 조정(증5,382백만원)은 타당하다고 판단되며,

○ 3차분 계약금액 범위에서 원활한 공사추진 및 효율적인 예산관리를 위한 물량조정은 타당한 것으로 판단됨.

- 설계변경 자문 (소)위원회 심의 완료 :`17.12.06

5		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 설계변경(총괄4회, 3차1회) 건에 대해서는 건설사업관리단 검토의견과 같이 승인하고, 계약금액 조정을 시행하여 공사진행에 만전을 기하고자 함.

- 공사비 변경

· 총  괄 : 증)5,382백만원

· 3   차 : 변경없음

붙 임 : 관리단 공문 및 검토의견서 1부.  끝.