문서번호	도시철도토목부-16898
결재일자	2017.12.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조규양		최진규	12/28 김진팔
협조
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

교통소통대책 관련 현안사항 검토

2017. 12.

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

교통소통대책 관련 현안사항 검토

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』관련 서울지방경찰청으로부터 통보된 교통소통대책 관련 건설사업관리단의 실정보고에 대한 검토보고임

※ 관련문서 : 하남 제17-1145호(‘17.12.26.)

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사개요 : 총연장 628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

○ 공사기간 : 2015.03.30. ~ 2019.03.28.

○ 공사금액 : 76,887백만원

○ 도 급 자 : 한신공영(주) 외 1개사

2		추진경위

○ ‘15.06.30. : 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 알림(교통운영과⇒본부)

○ ‘17.01.09. : 도로점용공사장 교통소통대책 사전검토결과 통보(교통운영과⇒본부)

○ ‘17.01.12. : 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 시행(교통운영과)

○ ‘17.03.09. : 공사중 교통안전시설 개선(변경) 설치 통보(서울지방경찰청⇒본부)

본선1구간 교통불편최소화를 위한 단계 조정, 고덕천교 통행유지에 따른 공사계획 변경, 정거장 구간 호이스트 설치에 따른 추가 점용

○ ‘17.03.10. : 공사중 교통안전시설 개선(변경) 설치 승인(본부⇒관리단)

3		실정보고 내용

○ 공사중 교통안전시설 개선(변경) 사항

구 분	내 용	비 고
교통관리계획 (본선1,2구간)	- 서울지방경찰청의 교통소통대책 자문회의 결과에 따른 개선계획 반영
변경사유	- 본선1구간 지장물 이설 협의에 따른 시공계획 변경(한전, 도시가스, KT) - 고덕천교 도로폐쇄 계획 등 변경(전면통제→부분통제) - 호이스트 설치에 따른 작업장 추가 점용(발진기지 위치 변경)
조치내용 (경 찰 청 요청사항)	- 공사착공전 충분한 홍보 및 안내표지판 설치 - 공사구간 통제수 배치하여 교통 혼잡 방지 (교차로내 통제수는 필히 “모범 운전자” 배치 - 야간공사구간임을 인지할 수 있도록 밝은 조도 유지 및 공사구간 안내 시설물 설치 - 기타 도로공사 신고시 준수사항 등 엄수

※ 교통관리계획 총괄도

2-1

2-2

2-3

2-4~13

본선 2구간

정거장 시점

정거장 종점

① 통제수(교통정리원) 배치 검토

구 분	당 초	변 경
		서울지방경찰청 승인			현재까지(’17.10.31)
		’16.02.01~ ’17.10.31 (금회승인)	’17.11.01~ ’18.12.31 (향후반영)	소계	승 인	투 입	내역서적용
투 입 인 (명)	600	3,743	2,549	6,292	3,743	1,355	2,118
투입금액 (천원)	36,963	321,474	200,740	522,214	321,474	174,449	174,375
통 제 수	교통정리원	통제수 교차로통제수 보행안전도우미	통제수 교차로통제수 보행안전도우미		통제수 교차로통제수 보행안전도우미	통제수(보통인부) 교차로통제수 (모범운전수) 보행안전도우미 (서울시 협회)	통제수(보통인부) 교차로통제수 (보통인부) 보행안전도우미 (보통인부)

※ 투입금액 : 직접비 기준, 추가 투입분 향후 정산 예정

- 작업구간별 투입인원 검토(교통관리계획상 승인 기준)

구분		단계	보행안전 도 우 미(명)	교 통 정리원(명)	수량(명)	작업일	투입인원	작업시간	집계(명)	야간환산 집계(명)	환 산 (20/25)	비 고
본선 1구간	주간	2-1	3	5	8	11	88	8	88	88	70
	주간	2-2		4	4	19	76	8	76	76	61
	주간	2-3		5	5	38	190	8	190	190	152
	주야	2-4	2	4	6	5	30	24	90	105	84
	주야	2-5	1	4	5	18	90	24	270	315	252
	주야	2-6		3	3	3	9	24	27	31.5	25
	주야	2-7		3	3	3	9	24	27	31.5	25
	주야	2-8	2	2	4	4	16	24	48	56	45
	주야	2-9	2	2	4	4	16	24	48	56	45
	주야	2-10		3	3	3	9	24	27	31.5	25
	주야	2-11		2	2	3	6	24	18	21	17
	주야	2-12		4	4	3	12	24	36	42	34
	주간	2-13	2	1	3	5	15	8	15	15	12
	주간	작업구		3	3	152	456	8	456	456	365
		소계							1,416	1,514.5	1,212
본선 2구간	주간	1	2	1	3	548	1,644	8	1,644	1,644	1,315	1구간 2명 중복 제외
	주간	2		2	2	0	-	8	-	-	-	1구간 2명 중복 제외
		소계							1,644	1,644	1,315
본선 3구간											-	터널구간 제외
											-
		소계							-	-	-
정거장	주간	1	1	1	2	638	1,276	8	1,276	1,276	1,021	중복구간 2명→1명
	주간	2		1	1	244	244	8	244	244	195	중복구간 2명→1명
		소계							1,520	1,520	1,216
계									4,580	4,678	3,743
(2016.02.01~2017.10.31까지 반영분)											2,118

② 상일동역 교차로 구간 가시설공사 단가 검토

구 분	주간 공사	주, 야간 공사	비 고
단 계	2-1(11일), 2-2(19일), 2-3(38일), 2-13(5일) 본선1구간 작업구(152일) 본선2구간 1,2단계(548일) 정거장구간 1,2단계(882일) 총 일수 : 1,655일	2-4단계(5일), 2-5단계(18일), 2-6단계(3일), 2-7단계( 3일), 2-8단계(4일), 2-9단계( 4일), 2-10단계(3일), 2-11단계(3일), 2-12단계(3일) 총 일수 : 46일	“교통관리계획” 참조
단가적용	“계약단가 적용”	“협의단가 적용” - 주,야간 공사에 따른 할증 적용

○ 수량 증·감 현황

구 분	단위	당 초	변 경	증 감	비 고
통제수(교통정리원)	인	600	2,118	증 1,518
가시설 (교차로구간 파일항타, 주형보, 복공)	식	주간	주간, 주·야간	야간

○ 공사비 현황

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
통제수(교통정리원) 변경	45,358	253,462	208,104
상일동역 교차로 작업시간 변경	136,642	223,538	86,896
총공사비	182,000	477,000	295,000

4		건설사업관리단 검토 의견

○ 공사중 교통안전시설 개선(변경)은 현장 교통소통대책 자문회의 결과를

반영한 사항으로서, 서울지방경찰청 조치요청 사항에 따라 교차로구간 통제수(교통정리원) 배치 및 주, 야간 작업 반영하였으며,

’17.11.01일 이후 통제수(교통정리원)의 추가 발생분은 향후 정산 예정임.

○ 수량 및 단가 산출은 적정하게 적용되었으며, 추가 공사비(295,000천원)는

도시철도토목부 설계변경 심의를 거쳐 설계 반영함이 타당할 것으로 사료됨.

5		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 교통안전시설 개선(변경) 실정보고 건에 대하여 건설사업관리단 검토의견과 같이 승인하고,

- 공사비 증액 295백만원

○ 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 설계변경시 정산 반영하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

첨부 : 실정보고 서류 1 식.  끝.

○ 통제수(교통정리원) 근무 및 상일동역 교차로 구간 가시설(야간) 공사 사진

교차로구간 가시설공사(야간) 전경	교차로구간 가시설공사(야간) 전경
교차로구간 가시설공사(야간) 전경	교통정리원 근무 전경
교통정리원 근무 전경	교통정리원 근무 전경