문서번호	도시철도토목부-398
결재일자	2018.1.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	궤도과장	도시철도토목부장		도시철도국장
조규양	최진규	이도헌		01/10 박상돈
협 조	주무관		이경훈
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

발주계획(4차공사) 검토

2018. 1.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』

발주계획(4차공사) 검토

우리본부에서 장기계속사업으로 시행하고 있는『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』4차분 발주계획에 대한 검토 보고임.

※ 관련문서 : 하남 제18-018호(`18.01.04)

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사규모 : 총 연장 628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

○ 공사기간 : 2015.05.30.~2019.03.28.

○ 도 급 액 : 76,887백만원

○ 도 급 자 : 한신공영(주)외 1개사

○ 관 리 사 : ㈜동일기술공사

2		계약 및 발주현황

(단위 : 백만원)

구 분		총 괄	기 준공 (1~3차)	금회 발주 (4차)	잔여분
공사비	계	82,759 (100%)	32,383 (39.13%)	17,976 (21.72%)	32,400 (39.15%)
	도급비	76,887	31,177	16,137	29,573
	관급비	5,872	1,206	1,839	2,827
공사기간		`15.05.30 ~`19.03.28	`15.05.30 ~`17.12.31	착공일 ~`18.12.31	-

3		발주(4차공사) 계획

○ 공사기간 : 착공일로부터 ‘18.12.31.까지

○ 발주금액 : 17,976백만원(도급비 16,137, 관급비 1,839)

〈 공종별 발주금액 〉

(단위 : 백만원)

구 분	총괄금액	발 주 금 액			잔여분
		기 준공 (1~3차)	금회 발주 (4차)	소 계
1.토 목	50,048	23,655	11,527	35,182	14,866
1.1 가설공	1,865	1,061	293	1,354	511
1.2 본선	8,431	4,662	2,609	7,271	1,160
1.3 본선터널	4,524	1,936	2,079	4,015	509
1.4 정거장	27,077	13,623	4,674	18,297	8,780
1.5 본선환기구	4,140	1,752	794	2,546	1,594
1.6 차량기지 입출고선	111	-	111	111	-
1.7 고덕천교	2,378	347	864	1,211	1,167
1.8 도로복구공	369	13	-	13	356
1.9 조경공사	446	137	-	137	309
1.10 도급자 지장물이설비	707	124	103	227	480
2.건 축	3,915	-	-	-	3,915
3.전 기	51	-	7	7	44
4.설 비	36	-	28	28	8
직접공사비 계	54,050	23,655	11,562	35,217	18,833
간접공사비	18,008	7,039	3,706	10,745	7,263
PS공종	1,416	140	-12	128	1,288
물가변동(1회,2회)	3,413	343	881	1,224	2,189
도 급 금 액	76,887	31,177	16,137	47,314	29,573
관 급 자 재	5,872	1,206	1,839	3,045	2,827
총 공 사 금 액	82,759	32,383	17,976	50,359	32,400

〈 4차 공사내용 〉

(단위 : 백만원)

구 분		공종 및 수량	금 액	추 진 내 용
토목	가설공	살수차 운영 : 8개월 점검통로 및 계단철거:754m	293	-
	본선개착	토공굴착 : 4,253㎥ 콘크리트 타설 : 5,332㎥	2,609	1구간 : 구조물 완료 2구간 : 구조물 완료
	본선터널	터널굴착 : 4,088㎥ 라이닝콘크리트 : 1,982㎥	2,079	라이닝 콘크리트 완료
	정거장	콘크리트 타설 : 16,375㎥ 거푸집 설치 : 24,601㎡ NTR 내부굴착 : 11,678㎥	4,674	정거장 구조물 타설(개착 : 103.5m) NTR 구조물 완료(비개착 : 64.5m)
	본선환기구	토공굴착 : 3,966㎥ 콘크리트 타설 : 2,163㎥	794	환기구#1,#2 : 2층 구조물 완료
	입출고선	콘크리트 타설 : 405㎥ 바닥/벽체 방수 : 2,078㎡	111	구조물 완료 L=16.9m
	고덕천교	콘크리트 타설 : 891㎥ 상부거더 및 제작 : 14본	864	상류측 : 가교 철거 하류측 : Slab 타설
	도급자 지장물이설	소화전 이설 : 4개소 상수도 이설 : 72m	103	본선 1구간 시점부 고덕천
	전기 및 설비 공사	본선터널 전선관 설치 본선터널 임시환기설비 외	35	터널 공사용 임시시설
직접공사비 계			11,562
제경비,제요율제외공종, 물가변동			4,575	물가변동(1회, 2회) 등
도급금액			16,137
도급자설치 관급자재		레미콘 및 아스콘 외	1,675
관급자설치 관급자재		교량난간 및 PC BOX외	164
총공사비			17,976

4		공사관련자 현황

구 분	소 속	직 명	성 명
설 계 자	(주)동일기술공사	책임건설사업관리자	홍 춘 선
심 사 자	(주)수성엔지니어링	기술지원 건설사업관리기술자	강 병 윤
확 인 자	(주)동일기술공사	대표이사	황 주 환
지원업무 수 행 자	도시기반시설본부	도시철도토목부 공사관리관	조 규 양

5		관리단 검토의견

○ 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사(4차) 발주설계서는 ‘18년 공사계획 수립에 따른 금차(4차) 세부예정공정표에 의하여 물량 및 공사비를 산정하였으며,

○ 공사기간은 3차공사 준공일 이후 ‘18.12.31.까지로 적정하다고 판단됨.

6		조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 4차 공사를 발주하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 관리단 공문 및 검토의견서 1 부.

2. 발주설계서 1 부.

3. 수량산출서 1 부.

4. 발주 요약서 1 부.

5. 예정공정표 1 부.

6. 발주도면 1 부.  끝.