문서번호	도시철도토목부-2671
결재일자	2018.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조규양		최진규	03/06 이도헌
협조	송변전과장		서태창
	토목1과장		윤방식

『하남선(5호선 연장) 건설사업』관련

통합공정회의 개최 결과

2018. 03.

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 건설사업』관련

통합공정회의 개최 결과

하남선(5호선 연장) 건설사업의 원활한 추진과 효율적인 공정관리를 위하여 서울시, 경기도, 현장관계자 간 통합공정회의를 개최하고 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일    시 : ‘18.02.27.(화) 14:30

○ 장    소 : 하남선 3공구 현장상황실

○ 대상현장 : 하남선 1~5공구, 궤도공사

○ 참 석 자

- 서울시 : 도시철도토목부장, 토목1과장, 궤도과장, 공사지원과장, 차량과장, 분야별 공사관리관

- 경기도 : 철도건설과장, 하남선1팀장, 하남선2팀장, 기술지원팀장, 분야별 공사관리관

- 현  장 : 하남선1~5공구, 궤도공사 건설사업관리책임기술자 및 현장소장

○ 안    건

- 하남선 토목공사(1~5공구) 및 궤도공사 공정보고, 시스템 분야별 추진상황 등 주요현안사항 논의

□ 회의내용

【 경기도 】

〈철도건설과장〉

○ 서울외곽순환고속도로 하부 통과구간 공사가 순조롭게 추진되고 있으며, 토목구조물 인수인계에 철저를 기하여 주시기 바람

○ 공정보고자료 통일하도록 양식 보완 요함

【 서울시 】

〈도시철도토목부장〉

○ 하남선 인수인계를 위하여 기존 우이~신설 및 9호선 2단계의 문제점을 파악 운영사와 사전에 긴밀히 협의 등 애로사항이 없도록 조치 필요

○ 궤도, 시스템에서 개통 대비 공정 점검토록 하고 토목분야는 만회 대책 수립이 필요함

〈토목1과장〉

○ 하남선 공구별로 공정보고 양식이 상이하므로 같은 양식으로 작성 요함

○ 구조물 완료 시점이 당초와 변경되었으면 전, 후 대비가 될 수 있도록 작성 요함

○ 지체 및 시각장애인 관련 시설은 규정에 맞도록 설치하여 주시고 필요시 서울시에서 교육 등 협조하겠음

○ 공구별로 자재투입구(작업구) 설치현황을 양식에 따라 작성하여 제출하여 주시기 바람

〈궤도과장〉

○ 개통까지 원활한 사업추진을 위하여 토목분야에서 후속공종에 적극 협조 바람

○ 토목구조물 선형 및 단면계획은 각 분야간 인터페이스를 종합적으로 고려하여 설계 시공되어야 하므로,

- 토목구조물을 선형대로 시공하지 못한 경우에는 원인제공자가 발주처에 선형변경안을 제출, 승인을 득하여야 하며, 이 경우 시스템 설치 및 열차 운행 지장여부를 검토하고 비용 부담하여야 함

- 토목설계서에 있는 작업구를 감안 후속공종 설계, 시공이 이루어지므로 작업구 변경시에는 토목에서 후속공종과 협의하여 대안을 마련하여야 함

○ 1단계 구간 토목구조물이 완료되고 있어 궤도, 시스템 공사 등 후속공사의 원활한 추진을 위하여 인계인수일자 준수 등 관련사항 철저 시행 요함

- 토목구조물 인수인계는 폐기물·공사자재 반출, 물청소 및 합동측량까지 완료되어야 함

- 토목구조물 인계 1개월전에 전체구간 선형측량 및 공구 간 측량결과서 제출

- 레일, 분기기 등 자재 반입 및 적치와 용접에 필요한 작업장은 600m 이상 확보 요함

- 도상콘크리트 타설은 연속하여 1㎞ 이상 확보 필요

○ 열차 반입 전 건축한계 측정이 선행되어야 하므로 경기도에서 계획수립 요함

〈송변전과〉

○ 시스템 공사는 총사업비 확정 후 발주 가능하며(‘18년 6월경 착수 예정), 장기간 소요되는 자재는 계약되어 제작 중에 있으므로 금년내 시스템공사 완료하도록 추진하겠음

○ ‘18년 5월까지 본선에 지장물을 제거하여 주시고, 정거장 내 기능실 완료되어야 변압기 반입설치 등 작업 후 9월 수전 예정이며, 10월까지 신호기계실, PSD에 전기공급 가능함

〈차량과장〉

○ 시운전 계획을 수립하기 위하여는 개통일자 결정이 필요함

□ 향후계획

○ 하남선 사업의 원활한 추진 및 개통 대비하여 서울시, 경기도, 공사관계자 간 긴밀히 협의 〈다음 회의는 서울시에서 경기도와 일정 협의하여 개최〉

회의 사진

끝.