문서번호	하천관리과-8598
결재일자	2018.6.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	하천계획팀장	하천관리과장		물순환안전국장
이평주	이승우	손경철		06/15 한제현
협 조

‘홍제천 상류 자연성회복 및 경관복원을 위한’

우선사업구간(1구간) 사업추진 계획

2018. 6.

물 순 환 안 전 국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

‘홍제천 상류 자연성회복 및 경관복원을 위한’

우선 사업구간(1구간) 사업추진 계획

◦ 홍제천 상류 세검정일대 하천환경을 개선하고 역사와 문화적 스토리를     찾아내어 도시재생을 통한 도심속 명소 조성을 위한 사업으로

◦ 전체 사업이 장기간 추진이 필요한 대규모 사업으로 단계별 시행이   불가피하여 우선 1구간에 대한 추진계획을 마련하여 시행하고자 함

Ⅰ		용역개요

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 홍제천상류 자연성회복 및 경관복원 기본계획 수립용역

○ 과업구간 : 홍제천 상류시점 ~탕춘대성 2.6km

(평창천 1.75km, 구기천 2.09km 포함)

○ 기    간 : 2016. 10. ~ 2018. 6.

○ 용 역 비 : 678,270천원

○ 용 역 사 : 동부엔지니어링(주)외 2개사

□ 주요 추진경위

○ ’16.10.07    : 기본계획 용역 착수(’18.6. 완료예정)

○ ’17.07.27.

~ ‘17.09.27 : 기본계획 부시장보고(2회)

○ ’17.09.14    : 시범구간 설계 지역수자원관리위원회 심의(조건부 가결)

○ ’17.09.28    : 시범구간 기본 및 실시설계 완료

○ ’17.11.21    : 기본계획 및 시범공사 종로구청장 보고

○ ’17.12.22    : 시범공사 착공(’18.12.준공예정)

○ ’18.05.28    : 타당성조사(기본계획 포함) 공공투자관리센터 검증

Ⅱ		기본계획 주요내용

□ 전체사업

○ 사업기간 : 2015 ～ 2030년

○ 총사업비 :  3,622억원(보상비 1,821억원)

○ 단계별 추진계획 : 장기간의 대규모사업으로 구간별 추진

구 분	1구간	2구간	3구간
주요내용	이요동 계류정원 (하천환경 및 접근성 개선)	창의예술광장 (지역문화 소통공간)	세검정계곡 (세검정 등 복원)
기 간	2015~2020	2021~2024	2025~2030
사 업 비 (보상비)	389억원 (278)	995억원 (425)	2,238억원 (1,118)
추진계획	금회 하천정비 제외하여 투자심사 상정 사업추진	교통체계개선(2구간), 사유지 보상 등에 따른 주변개발계획 추이, 주민과의 소통을 통해 별도 추진

□ 타당성조사 검증의견(공공투자관리센터) 반영내용

구분	검증의견	반영사항
필 요 성	-세부사업간의 연계성 부족	-주변지역과 연계, 테마산책로 조성 등을 통해 사업 구간별 단계추진 당위성 확보
기본계획	-1구간 하천정비 보완 -2구간 회전교차로 재검토 -3구간 현실적인 보상비 재검토	-빗물활용 유지유량 확보, 제방 여유고 확보 등 반영 -회전교차로는 슬로시티를 위한 필수계획으로 사업 시행시점에 평창터널 등 관련사업과 함께 재검토 제안 -보상비중 지장물 보상비는 현실적인 금액 재산출 반영
경 제 성 분 석	-1구간 별도분석 필요	-우선사업구간 할인율 등 오류정정 별도 분석(B/C: 1.19)
추진계획	-구간별 운영계획, 재원조달계획을 구체화	-도시계획시설(공공청사, 공지, 광장 등)운영부서 제시 -재원조달은 전액시비로 계획되었으나, 세검정복원 등 문화재 관련예산은 사업시점에 관련 국비확보 제안

Ⅲ		우선사업구간(1구간) 추진계획

○ 사업개요

구 분		규모	사업비 (억원)	추진기간	비고
계			389
하천정비 (65억원)	시범공사	차집관로 이설(341m), 산책로 조성(165m)	49 【기투자 11】	’17년～’19년	투자심사 제외 (지방재정 투자 심사 지침)
	본공사	유지유량 확보시설	16	’19년～’20년
			324억원 (보상278, 설계11, 공사35) 【기투자 8】	’18년～’20년	투자심사 상정
경관개선 (324억원)	이요동마당	974㎡
	능금밭조성	6,111㎡
	문화마당	1,657㎡
	통경축	315㎡

※ 공공투자관리센터 검증의견 반영 보상비 재산출(별첨)

○ 연차별 추진계획

(단위: 억원)

구분	합계	기 투자	2018년	2019년	2020년
계	389(65)	19(11)	14(11)	305(27)	51(16)
공사비 (하천정비)	100(65)	11(11)	11(11)	27(27)	51(16)
설계비	11	8	3	-	-
보상비	278	-	-	278	-

Ⅳ		향후계획

○ ‘17. 7. 26.       : 투자심사

○ ‘17.12 ~’19.12. : 하천정비 시범공사 추진

○ ‘18. 6 ~’18.12. : 하천정비사업 추진을 위한 하천기본계획 변경추진

○ ‘18. 7 ~’19. 6. : 기본 및 실시설계(1구간 경관개선사업)

따로붙임 1. 사업구간별 마스터플랜 1부

2. 공공투자관리센터 검증의견 반영사항 1부

3. 보상비 재산정 상세내역 1부

4. 투자사업 심사분석 의뢰서 1부(별도)  끝.