문서번호	하천관리과-14708
결재일자	2018.10.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	청계천관리팀장	하천관리과장		물순환안전국장
윤희성	민형일	손경철		10/15 배광환
협 조

『사당천 단면확장 기본 및 실시설계』

설계변경 검토보고

2018.10

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	■	□

- 사당천 단면확장 기본 및 실시설계 -

설계변경 검토보고

사당천 단면확장 기본 및 실시설계 용역 추진중 상류구간 추가 단면확장 등에 따른 설계변경 검토결과를 보고드림

용역개요

○ 용 역 명 : 사당천 단면확장 기본 및 실시설계

○ 용역기간 : 2018. 5.14. ~ 2018.11.9

○ 용역업체 : ㈜화신엔지니어링 외 1개사(㈜동해종합기술공사)

○ 용 역 비 : 357,438천원

○ 과업내용

- 사당역 일대(동작구 및 서초구)의 침수를 저감시키기 위한 사당천 단면확장을 통한 하천 통수능 확대

○ 추진경과

- ‘18. 5.14 : 기본 및 실시설계 착수

- ‘18. 6 : 측량 및 지장물 조사 시행

- ‘18. 7 : 지장물 협의 시행

- ‘18. 8 : 착수보고 시행

- ‘18. 9 : 우선시공구간 자문 시행

설계변경 사유

○ 기본 및 실시설계를 위한 현황측량, 지하매설물 조사, 지장물 이설 협의, 해당지역 현황조사 결과에 따른 변경물량 반영

○ 현재 방배경찰서는 신축계획에 의해 임시청사로 이전한 상태이며. 기존 경찰서 ‘19년 하반기 철거 및 신축공사 시행 예정으로

○ 해당 공사와 연계하여 사당천 단면확장 가능여부에 대하여 지장물 조사를 시행하는 한편 및 관계기관 협의를 시행하고자 함

설계변경 내용

○ 설계내용

- 당 초

· 사당천 우안 암거설치, □2.0m×5.0m, L=570m

· 지하매설물 조사 : GPR 조사 20개소, 지장물 터파기 4개소

- 변 경

· 사당천 좌안 암거설치(변경), □3.5m×2.0m ~ □3.5m×3.5m, L=557m

· 사당천 좌안·우안 암거설치(추가), □2.5m×4.0m ~ □3.0m×4.0m, L=163m

· 이수역 ~ 방배경찰서 구간 단면확장 검토(L=411m)

· 지하매설물 조사 : GPR 조사 34개소, 지장물 터파기 22개소

○ 계약기간

- 당 초 : 2018. 5.14.∼2018.11.9

- 변 경 : 2018. 5.14.∼2019.2.28

○ 계약금액

- 당 초 : 357,438천원

- 변 경 : 459,274천원 (증101,836천원)

※ 일반회계 / 치수 및 하천관리 / 수방대책 사업/ 동작구 사당역 일대 배수개선

향후계획

○ ‘18.10월 : 계약변경 의뢰(재무과)

○ ‘18.11월 : 굴착조사 및 GPR탐사 시행 및 추가단면확장 검토

○ ‘19.2월 : 용역준공

따로붙임 : 1.위치도 1부.

2.설계변경 내역서 1부. 끝.