문서번호	역사도심재생과-1920
결재일자	2019.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도심정책팀장	역사도심재생과장
이기명		김용민	02/21 조남준
협조

용역 일시정지 검토 보고

932〈T

(을지로 입체보행공간 조성 설계공모 관리)

2019. 2.

역사도심재생과

용역 일시정지 검토 보고

「을지로 입체보행공간 조성 설계공모 관리」

을지로 입체보행공간 조성 설계공모 관리 용역의 과업 수행은 기본계획이 확정되어야 가능하므로 일시적으로 용역을 정지하고자 함

Ⅰ		용 역 개 요

❍ 용 역 명: 을지로 입체보행공간 조성 설계공모 관리

❍ 과업범위

- 공간적 범위: 을지로 일대 지상·지하 보행로 주변지역

(시청역~동대문역사문화공원역, 길이 3.0㎞)

- 내용적 범위: 설계공모 관리 전반(기획, 홍보, 심사, 전시, 위원회 운영 등)

❍ 용역기간: ‘19. 1. 21. ~ ‘19. 8. 20.

❍ 용 역 비: 98,835천원

❍ 용 역 사: 엠에이건축사사무소(대표 유태림)

Ⅱ		추 진 경 위

❍ ‘18. 12. 7. : 용역 추진계획 변경

❍ ‘18. 12. 19. ~ ‘19. 1. 9. : 입찰공고

❍ ‘19. 1. 11.: 제안서 평가(협상적격자 선정)

❍ ‘19.  1.  15.: 기본계획 수립 용역 계약

❍ ‘19.  1.  21.: 계약 및 착수

❍ ‘19.  1.  24.: 설계공모 의뢰(→ 도시공간개선단)

Ⅲ		보 고 내 용

❍ 용역 일시정지 사유

- 본 용역은 을지로 입체보행공간 조성 기본계획 수립 용역의 과업 진행에 따라 국내외 수준높은 전문가 참여를 통해 창의적이고 우수한 당선작을 도출하기 위한 설계공모 관리가 주 과업으로서

- 운영위원회 구성 및 공모지침를 작성 등 공모절차는 기본계획이 확정되어야 가능함에 따라 기본계획 수립에 소요되는 2개월 동안 공모용역에서 수행할 과업이 사실상 없으므로 용역의 일시정지가 필요함.

	※ 용역의 일시정지
(행정안전부) 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제14장 용역계약 일반조건) 계약담당자는 다음 각 호의 경우에는 용역의 전부 또는 일부의 수행을 정지시킬 수 있다. 1) 용역의 수행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우 2) 용역의 전부 또는 일부의 안전을 위하여 정지가 필요한 경우 3) 그밖에 발주기관의 필요에 따라 계약담당자가 지시한 경우

❍ 정지 기간: 2019. 3. 1. ~ 2019. 4. 30.(61일간)

Ⅳ		조 치 계 획

❍ 위와 같이 용역을 일시정지하여 과업을 중단하고 ‘19. 5월에 해제하는 것으로 계약부서와 용역사에 용역 일시정지 통보.  끝.