문서번호	하천관리과-4476
결재일자	2019.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	청계천관리팀장	하천관리과장		물순환안전국장
윤희성	민형일	한유석		03/28 이정화
협 조
	하천계획팀장		이승우

『생태하천 조성 시범사업 기본 및 실시설계』

설계변경 검토보고

2019.3

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	■	□

- 생태하천 시번 조성사업 기본 및 실시설계 -

용역기간 연장 검토보고

생태하천 조성 시범사업 기본 및 실시설계 용역 추진 중 소규모환경영향평가 시행 등에 따른 용역기간 연장 검토결과를 보고드림

용역개요

○ 용 역 명 : 생태하천 조성 시범사업 기본 및 실시설계

○ 용역기간 : 2017.8.9. ~ 2019.3.31

○ 용역업체 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사(㈜이산, ㈜청운이엔씨(측량))

○ 용 역 비 : 839,660천원

○ 과업내용

- 묵동천 : 수질 수생태 개선, 친수공간 조성 등

- 성내천 : 고지배수로 침사지 정체수 해소, 저수호안 및 낙차공 개선 등

추진경과

○ ‘17.08.09 : 기본 및 실시설계 착수

○ ‘18.07.26 : 1차 차문 시행(묵동천, 성내천)

○ ‘18.10.24 : 2차 자문 시행(묵동천)

○ ‘18.11.28 : 성내천 수질모티너링 분석결과 정보공유

- 성내천 하류부 오염도가 풍납취수장 수질에 영향을 미치므로 하류부 수질오염 저감 필요

○ ‘19.3.25 : 중간보고

- 성내천 침사지 정체수 한강(잠실 수중보 하류) 배제 방안 등 보고

- 정체수 해소방안에 대한 대안검토 필요

용역기간 연장 사유

○ 성내천 침사지 정체수 한강(잠실 수중보 하류) 방류관로 계획 등에 따른 소규모환경영향평가 시행이 필요하여 해당기간 반영

변경 내용

○ 계약기간

- 당 초 : 2017.8.9.∼ 2019.3.31

- 변 경 : 2017.8.9.∼ 2019.6.30

○ 계약금액(변경없음) : 835,700천원

향후계획

○ ‘19.3월 : 계약변경 의뢰(재무과)

○ ‘19.3월 ~ 6월 : 소규모 환경영향평가 시행, 전문가 자문 시행

○ ‘19.7월 : 설계준공

따로붙임 : 위치도 1부.끝.