투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(부진공정 만회대책 등 수립 시 안전확보 고려 철저 요청)

1. 업무지시현장 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 주식회사 동일기술공사, 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 주식회사 대한콘설탄트

2. 작 성 일 자 : 2019-09-11 10:09:09

3. 지 시 내 용

가. 총무부-18219(2019.9.9.)호와 관련입니다.

나. 우리 본부에서 시행 중인 『하남선(5호선 연장) 1-1공구 및 1-2공구 건설공사』와 관련하여 ‘건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부 고시 제385호. ’18.7.1.)’ 제64조에 따라,

다. 건설사업관리단(건설사업관리기술자)에서는 해당 공사가 정해진 공사기간 내에 시방서, 도면 등에 따른 품질을 확보하여 완성할 수 있도록 공정관리하여야 주시기 바랍니다.

라. 아울러 공사진도율이 계획공정 대비 월간 공정실적이 10%이상 지연되거나 누계공정실적이 5%이상 지연될 때는 시공사로 하여금 부진사유 분석, 부진공정 만회대책 및 만회공정표를 수립하도록 지시하고

마. 이 때에는 근로자 안전확보를 고려한 만회대책을 수립하도록 하여 현장공사관리 등에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  관련문서 1부.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							이형일			토목1과장					윤방식					도시철도토목부장					09/11 정대현
협조자				주무관						유원하
시행			도시철도토목부-9512									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 서울시도시기반시설본부 도시철도토목부															/
전화		02-772-7212						/전송			02)772-7306					/	thanks@seoul.go.kr												/	대시민공개