투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(물가변동 조정금액 포함된 제경비 정산 관련 사항 통보)

1. 업무지시현장 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 주식회사 동일기술공사

2. 작 성 일 자 : 2019-09-23 12:09:09

3. 지 시 내 용

가. 기술심사담당관-17168(2019.9.17.)호와 관련입니다.

나. 『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』 관련 기술심사담당관의 물가변동에 다른 계약금액 조정실태에 대한 특별점검 중으로, 일부 공사에 대한 점검결과 정산항목에 대한 미정산 사례가 확인되어 통보하니,

다. 물가변동 조정금액 중 아래 정산항목에 대하여는 준공(장기계속공사인 경우 차수별 준공 포함)시 물가변동이 반영된 만큼 추가로 사용하거나, 추가로 사용하지 않은 경우 물가변동에 포함된 제경비를 비율에 맞게 감액하여야 하나,

라. 추가사용의 확인 또는 정산이 제대로 이루어지지 않은 채 준공되지 않도록 관련업무 처리시 조치하시기 바랍니다.(기 물가변동 조정금액은 차후 조정(변경)시 조치반영)

- 정산항목 : 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금, 산업안전보건관리비, 하도급대급지급보증수수료

붙임  감사원 감사자료 1부.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							이형일			토목1과장					윤방식					도시철도토목부장					09/23 정대현
협조자				주무관						한재호
시행			도시철도토목부-9853									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 서울시도시기반시설본부 도시철도토목부															/
전화		02-772-7212						/전송			02)772-7306					/	thanks@seoul.go.kr												/	부분공개(5)