문서번호	토목부-21685
결재일자	2019.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		박일연	11/27 代박일연
협조

창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 시설공사 발주계획(2차) 보고

2019. 11.

도시기반시설본부

(토  목  부)

창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업

시설공사 발주계획(2차) 보고

‘창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업’을 전체계약 범위 내에서 2차 시설공사를 발주하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

[관련근거 : 창덕궁감 제2019-216호(2019.11.26.)

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업

□ 위    치 : 돈화문로 외 5개 주요가로

□ 규    모 : 가로개선 폭 1.5~22m, 연장 2,400m

□ 공사기간 : ’18.12.26. ~ ’20.08.31(2차 : 착공일로부터 ~ ’20.08.31)

□ 도 급 비 : 6,725,138천원(2차 : 925,138천원)

□ 시 공 사 : 다이치종합건설㈜ 외 1개사

2차 공사

Ⅱ		추진경위

□ ’18.12.19. : 공사계약

□ ’18.12.26. : 공사착공(1차 공사)

□ ’19.11.04. : 준공기한 연기

- 총차 : ’18.12.26 ~ ’20.08.31.(1차 ’18.12.26 ~ ’20.07.31.)

Ⅲ		발주계획

□ 도급계약 현황

구 분		전 체	1차	금 회(2차)	비 고
계약금액 (천원)		6,725,138	5,800,000	925,138
공 정 율(%)		100%	86.2%	13.8%
계약기간		2018.12.26.~ 2020.08.31	2018.12.26.~ 2020.07.31.	착공일부터~ 2020.08.31.
공사 내용	위 치	돈화문로 등 5개소	돈화문로 등 5개소	돈화문로
	판석포장 (㎡)	20,415	16,967	3,448
	아스콘 포장(a)	175.35	163.51	11.84

□ 2차 공사 세부공종 현황

공 종	토 공			구조물공		포장공			부대공		비고
	터파기	되메 우기	잔토	흄관부설 (300mm)	맨홀 보수	판석 포장	아스콘 포장	경계석	차선 도색	교통 정리원
물량	837㎥	147㎥	630㎥	57본	19개소	3,448㎡	11.84a	558m	191	1,547hr

□ 예정공정표

공 종	금 액 (원)	비 율	2020년								비고
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
토목공사	513,801,537	55.53%	동절기 공사중지	0.53%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	15.00%	20.00%
제경비	411,336,463	44.47%		0.42%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	12.02%	16.03%
도급비	925,138,000	100.00%		0.95%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	27.02%	36.03%
				0.95%	9.95%	18.95%	27.95%	36.95%	63.97%	100.00%

□ 추진일정

○ ’19.11.27. : 시설공사(2차) 계약의뢰(토목부 → 총무부)

○ ’19.12.     : 시설공사 착공

Ⅳ		조치의견

□ 상기와 같이 ‘창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업’에 대하여 전체계약금액 내에서 금회(2차) 시설공사 발주를 시행하고자 함.

○ 예산과목

- 지속가능한 역사문화도심 구현, 도심역사 문화자원 관리(도시개발특별회계), 창덕궁 앞 도성한복판 역사재생사업, 시설비(401-01) : 925,138천원

따로붙임  1. 감리단 발주계획 검토의견서 1부.

2. 설계내역서(2차) 1부.  끝.