＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서울물연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	전기공사 설계변경 시행(서울물연구원 연구실 증축 전기공사)

1. 배급수연구과-2867(2019.3.29.)호와 관련입니다.

2. “서울물연구원 연구실 증축 전기공사” 의 도급비 증가 사유 발생으로 아래와 같이     준공 전 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 서울물연구원 연구실 증축 전기공사(장기계속) 2차

나. 계 약 자 : ㈜은하전기 대표 정기덕

다. 계약기간 : 2019.3.29. ~ 2019.11.28.(총차 2018.10.19.~2019.11.28.)

라. 변경사항 : 물량 증·감 및 신규공종 발생

마. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
도급비 (’19년도 분)	155,471,960	158,725,000	3,253,040
총 부기금액	205,471,960	208,725,000	3,253,040

바. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 서비스장비확충 및 환경개선,                     시설비 및 부대비, 시설비

[서울물연구원 연구실 증축 전기공사(장기계속) 2차]

※ 본부 안전총괄과 심의완료(‘’19.11.26) 및 경비(건강보험 등) 정산

따로붙임 : 1. 설계변경 보고서          1부.

2. 설계변경내역서(심사완료) 1부.

3. 설계변경정산내역서       1부.

4. 설계변경 합의서          1부.  끝.

★주무관	최병석		배급수과장	백승학		수도연구부장	11/28 代백승학
협조자	주무관	이준영
시행	배급수연구과-8531	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 (구의동)	/
전화	3146-1831	/전송	3146-1836	/	cbs63@seoul.go.kr	/	부분공개(5)