투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰[도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입) 설치공사]

우리 부에서 시행 중인 「도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입) 설치공사」에 시설공사 및 통합건설사업관리용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 사 업 명: 도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입) 설치공사

2. 위    치: 중랑구 묵동, 신내동

3. 규    모: 폭 5m, 램프 1,479m(교량 779m)

4. 계약현황

구 분		시설공사	통합건설사업관리용역
계 약 명		도시고속도로 연결램프 (화랑로 진출입) 설치공사	도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입) 설치공사 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역
계 약 자		케이비아이건설(주) 외 1개사	㈜동일기술공사 외 1개사
계약 금액	총차	20,692,289천원	2,226,990천원
	1차	1,800,000천원	257,800천원

5. 준공기한 변경내역

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
시설공사	총차	’19.05.08.~’22.10.18. (1,260일)	’19.05.08.~’22.10.18. (1,260일)	변경없음	금 액 변경없음
	1차	’19.05.08.~’19.12.31. (238일)	’19.05.08.~’20.12.31. (603일)	(증)365일	″
통합건설사업관리용역	총차	’19.05.13.~’22.12.12 (1,310일)	’19.05.13.~’22.12.12 (1,310일)	변경없음	″
	1차	’19.05.13.~’19.12.31. (233일)	’19.05.13.~’20.12.31. (598일)	(증)365일	″

6. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 도급계약자 귀책사유 없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 사업계획 변경에 따른 공사중지와 보완설계용역 시행으로 준공기한 연기

따라붙임 1. 준공기한 연기 검토보고서(방침서) 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 각1부.

3. 시공사, 용역사 준공기한 연기 요청공문 각 1부.

4. 합의각서 각 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이성열		광역도로과장	박일연		토목부장	11/28 김용제
협조자
시행	토목부-21866	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	san730@seoul.go.kr	/	부분공개(5)