문서번호	토목부-21865
결재일자	2019.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		박일연	11/28 김용제
협 조

창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 건설폐기물처리용역 준공기한 연기 검토보고

2019. 11.

도시기반시설본부

(토  목  부)

창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 건설폐기물 처리용역

준공기한 연기 검토보고

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 건설폐기물 처리용역』의 준공기한 연기가 필요하여 이에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

□ 용역계약일반조건 제7절2(계약기간의 연장)

□ 건설폐기물 처리용역 계약기간 연장요청(창덕궁감 2019-218호, ’19.11.27.)

□ 준공기한 연기 검토보고(토목부-19949호, ’19.11.04)

Ⅱ		용역개요

□ 용 역 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 건설폐기물 처리용역

□ 규    모: 건설폐기물 운반 4,801㎥, 건설폐기물 처리 10,890톤

□ 공사기간: ’19.04.03. ~ ’19.12.31.

□ 용 역 비: 374,810천원

*****************************************

Ⅲ		검토내용

□ 준공기한 연기사유

○ 종로구청 요청사항으로 인한 재 설계로 착수 지연, 돈화문로 정조대왕 능행차 행사, 공사구간 하수관로 정비사업 간섭 등으로, 공사기간 변경

○ 창덕궁앞 도성 한복판 주요가로 개선사업의 공사기간 변경에 따른 건설폐기물 발생시기 연장

□ 감리단 의견

○ 2020년 발생되는 돈화문로 및 서순라길의 폐기물 발생 시기에 맞게 계약 기간을 연장함이 타당함.

□ 준공기한 변경현황

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
용역	’******************** ******	’******************** ******	*******	금 액 변경없음

Ⅳ		조치계획

□ 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업의 본 공사가 절대공기 부족으로 준공기한이 2020.08.31.까지 연기됨에 따라

□ 감리단 검토의견과 같이 건설폐기물 처리용역의 준공기한을 연기하고자 함.

□ ******************

따로붙임  1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 용역사 관련 서류 1부.   끝.