문서번호	배급수연구과-8556
결재일자	2019.12.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	배급수과장		수도연구부장
김성재	최병석	백승학		12/02 최영준
협 조

19년 "노후도 평가용 덕타일주철관 시료채취 운반.가공  용역"

설계변경(정산) 검토 보고

2019. 12

서울물연구원

(배급수연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

19년“노후도 평가용 덕타일주철관시료채취운반․가공 용역” 설계변경(정산) 검토 보고

19년 “노후도 평가용 덕타일주철관 시료채취 운반․가공 용역”의  공종별 물량 변경사항에 대한 설계변경 (정산)을 시행코자 함

Ⅰ		용역개요

□ 건    명 :  노후도 평가용 덕타일주철관시료채취 운반․가공 용역    □ 용역내용 : 덕타일주철관 시료채취 운반․가공 30지점(60건)

□ 계약금액 : 금31,564,800원

□ 계약일자 : 2019년   4월 11일

□ 착공일자 : 2019년   4월 11일

□ 준공기한 : 2019년 12월 13일

□ 계 약 자 : ㈜명신토건 대표자 김대성

Ⅱ		보고내용

□ 용역 시행 중 공종 물량 감소가 발생하여 설계변경(정산)이       필요한 실정임

Ⅲ		주요공종

구 분	당 초	변 경	증·감	변경사유
공 종	1. 덕타일주철관 세척 및 표면제거 30회(60건)	1. 덕타일주철관 세척 및 표면제거 24회(48건)	감)12건	이형관 11건 직관 1건 시료채취 못함

구 분	당 초	변 경	증·감	변경사유
공종	2. 덕타일주철관 연결부 분해 30개소(60건)	2. 덕타일주철관 연결부 분해 24개소(48건)	감)12건	이형관 11건 직관 1건 시료채취 못함
	3. 덕타일주철관 절단 30개소(60건)	3. 덕타일주철관 절단 24개소(48건)	감)12건	이형관 11건 직관 1건 시료채취 못함

❍ 덕타일주철관 노후도 평가용 시료 미채취 현황

채취일시	장 소	시료종류	채취결과
‘19. 8. 22	송파구	이형관 80mm	없음
‘19. 9. 02	동대문구	이형관 100mm	없음
‘19. 9. 26	서대문구	이형관 150mm	없음
‘19. 9. 30	은평구	이형관 150mm	없음
‘19. 9. 30	은평구	이형관 80mm	없음
‘19.10. 28	강서구	이형관 200mm	없음
‘19.11. 01	종로구	이형관 150mm	없음
‘19.11. 04	종로구	직관 150mm 이형관 150mm	없음
‘19.11. 12	도봉구	이형관 80mm	없음
‘19.11. 12	도봉구	이형관 100mm	없음
‘19.11. 13	영등포구	이형관 80mm	없음

※ 고용보험료, 산재보험료, 건강보험료 및 연금보험료 완납증명서 제출 확인

Ⅳ		설계변경 내역

건 명	구 분	당 초	변 경	증·감 액
덕타일주철관 노후도 평가용 시료채취 운반․가공 용역	총 용역비	31,564,800원	26,690,000원	-4,874,800원
	도 급 비	31,564,800원	26,690,000원	-4,874,800원

Ⅴ		조치의견

□ 용역시행 중 공종 물량 감소에 대한 설계변경(정산)을 실시 후 준공처리 조치함.

붙임 : 1. 노후도 평가용 덕타일주철관 시료채취운반-가공 용역 설계변경(정산)내역서 1부.

2. 2019년 덕타일주철관 관시료 채취 현황 1부. 끝.