문서번호	하천관리과-17927
결재일자	2019.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	하천생태팀장	하천관리과장		물순환안전국장
윤희성	민형일	한유석		12/05 이정화
협 조

도림천 단면확장 기본 및 실시설계

용역기간 연장 검토보고

2019.12

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	■	□

도림천 단면확장 기본 및 실시설계 용역기간 연장 검토보고

도림천 단면확장 기본 및 실시설계 시행 중 지장물조사 등을 위한 용역기간 연장 검토결과를 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 도림천 단면확장 기본 및 실시설계

○ 용 역 사 : ㈜한국종합기술, ㈜동일기술공사, ㈜선진엔지니어링종합건축사무소

○ 용 역 비 : 1,142백만원

○ 용역기간 : ‘18.7.16 ~ ’20.1.6

○ 용역내용

- 신림공영차고지 저류조 등 관련계획을 반영한 수리수문 검토

- 단면확장 최적방안 검토(좌안·우안, 반복개화·암거신설)

□ 추진경위

○ ‘16.7.12 : 안양천권역 하천기본계획 고시(서울특별시고시 제2016-145호)

- 도림천 하도의 통수능이 부족하여 일부 구간 단면확장 필요

(연장 1.6km, 폭 6.0~13.0m, 높이 2.0~3.0m)

○ ‘18.7.12 : 기본 및 실시설계 시행

○ ‘18.8.19 : 착수보고 시행

○ ‘19.4. 9 : 중간보고 시행(1차)

- 신림선 경전철 공사와 단면확장 공사가 간섭되지 않도록 검토 필요

- 하천 내 가교설치는 우기에 홍수위험을 가중 시킬 우려가 있어 신중한 검토 필요

○ ‘19.4. ~ ’19.10 : 지장물 조사방안 검토(업체 선정 등)

- 최초 업체 협의 결렬에 따른 타 업체 재협의

□ 중간보고(2차) 개요

○ 일시/장소 : 2019.12.3.(화) 15:00 ~, 물순환안전국장실

○ 참 석 자

- 물순환안전국장, 하천관리과장, 하천생태팀장, 담당 주무관, 용역사 기술자 3명

○ 보고내용

- 도림천 수리수문 현황 및 단면확장 계획(교통처리방안 및 개략공사비)

- 지장물 조사 현안사항(업체선정 결렬 등)

□ 주요의견

○ 대규모 사업으로 내부검토가 충분히 이루어져야 함

- 도림천 복개철거 등으로 대규모 예산투입이 수반되는 상황에서, 기본계획 대비 2배 이상 공사비(770억원) 투입이 필요한 사업으로 사업 추진에 대한 관련 전문가 자문 및 시장단 보고 필요

- 현재 도림천 치수능력, 사업시행 시기 등을 고려한 대안 및 지장물 조사 필요

○ 지역주민 및 환경단체 등과 공감대 형성 필요

- 신림선 경전철, 도림천 복개철거 등 대규모 공사가 진행중인 상황에서 하천공사 추가 시행에 따른 지역주민 및 환경단체 공감대 형성 필요

⇒ 정책결정을 위한 도림천 치수능력 검토 및 사업추진방안 보완 필요

□ 용역기간 변경

○ 당 초 : 2018.7.16 ~ 2020. 1. 6

○ 변 경 : 2018.7.16 ~ 2020.10.31

□ 계약금액 : 변경없음

□ 향후계획

○ ‘20.2월 : 전문가 자문 및 시장단 보고

○ ‘20.3월 : 시장단 보고에 따른 후속절차 이행. 끝.