“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역기간 연장 의뢰(도림천 단면확장 기본 및 실시설계)

1. 우리과에서 계약한 「도림천 단면확장 기본 및 실시설계 용역-장기2차」에 대하여 아래와 같이 용역기간 연장을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명 : 도림천 단면확장 기본 및 실시설계 용역-장기 2차

○ 계약업체 : ㈜한국종합기술 외 2개사

○ 과업내용 : 도림천 단면확장 기본 및 실시설계

나. 변경내용

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	642,300	642,300	변경없음
과업기간	‘19.1.1. ~ ‘20.1.6	‘19.1.1. ~ ‘20.10.31

○ 변경사유

- 지장물 조사기간 반영

- 정책결정을 위한 도림천 치수능력 검토 및 사업추진방안 보완

○ 예산과목 : 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 도림천(관악구) 단면확장

붙 임 : 1.방침서 1부.

2.합의각서 및 준공기한 연기 의뢰서 1부.끝.

	하천관리과장
주무관	윤희성		하천생태팀장	민형일		하천관리과장	12/06 한유석
협조자	계약1팀장	조현
시행	하천관리과-17944	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(5)