문서번호	영동대로복합개발추진단-9383
결재일자	2019.12.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	사업총괄과장	영동대로복합개발추진단장		도시철도국장
정용훈	김형건	이승석		전결 12/10 이진용
협 조
	복합개발토목과장		이재혁
	주무관		양경신
	주무관		윤영상
	주무관		윤득근

영동대로 지하공간 복합개발

토목공사 입찰안내서 심의 조치결과 보고

2019. 12.

도시기반시설본부

(영동대로복합개발추진단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	7.25건설기술심의의견반영
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

영동대로 지하공간 복합개발

토목공사 입찰안내서 심의 조치결과 보고

영동대로 지하공간 복합개발 4개공구 토목공사의 市 건설기술심의위원회 심의 의결사항에 대한 조치결과 등 입찰안내서 수정·보완사항을 보고드림

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 영동대로 지하공간 복합개발 1~4공구 건설공사(토목)

○ 위    치 : 삼성역 사거리(2호선 삼성역)~코엑스 사거리(9호선 봉은사역)

○ 규    모 : 복합환승센터 600m(지하7층, 토공량 약200만㎡), 철도터널 400m

○ 공사기간 : 착공일로부터 86개월

○ 공 사 비 : 10,018억원

Ⅱ		입찰안내서심의 조치결과

○ 심 의 일 : '19.7.25(목)

○ 심의결과 : 조건부 채택

- 위원별 지적사항 보완하고 방재안전분야 위원의 검토를 받는 조건

○ 심의 채택의견 반영여부 : 채택의견 120건 모두 반영

분야	심의위원	채택의견(건)	반영(건)	미반영(건)
계약관리	이＊형, 신＊영, 신＊철	28	28	-
토질 및 기초	김＊환, 전＊성	20	20	-
토목구조	원＊진	17	17	-
철도	김＊배	11	11	-
토목시공	이＊국	10	10	-
방재·안전	권＊효	11	11	-
환경	이＊란	5	5
교통	금＊정	7	7
기술심사담당관	권＊택	11	11
계		120	120	-

Ⅲ		입찰안내서 보완 주요내용

□ 심의의견 반영

①		국토부 ‘기술제안입찰 입찰안내서 표준안’('16.2 개정) 반영

- 기술제안사항이 부적격되어 원안대로 적용될 경우 원안의 내용대로 실시설계 및 시공(계약금액 증·감 규정 삭제)

- 생애주기비용(LCC) 개선방안 작성 시 이자율에 대한 지침 추가

- 평가항목에 ‘설계오류 및 누락에 관한 제안의 적정성’ 배점(가점 4) 반영

②		계약상대자 공사범위 및 비용범위 구체화

- 준공 전 전기, 소방 등 분리발주 공사는 제외하고 토목분야 시운전 완료

- 공사편의 및 설계오류로 인안 추가보상 시 계약상대자가 부담

- 레미콘, 화물연대 등 전국적 유관자 파업 등 시공통제 범위를 벗어난 경우 계약상대자 책임범위에서 제외

- 문화재 발굴조사 및 보존조치 등 문화재관련 계약상대자의 비용부담 제외

- 3공구 사업범위 추가(지장물관련 유관기관 TF팀 주관·운영)

- 계약상대자는 낙찰 후 본부의 승인을 득한 연구과제 제출

- 공구별 우선시공분 공사 규모 및 공종 구체화

- 화재 및 피난시뮬레이션 수행에 따른 토목구조물 변경 시 계약상대자 비용부담

- 계약상대자는 환경영향평가서의 환경오염저감대책이 충분히 반영된 시설 설치

③		기술제안범위 구체화, 추가

-(토질·기초분야) 기본설계 흙막이 가시설벽체 공법을 원칙으로 하고, 동등 이상의 방안 제시하며, 인접부 접속부 처리방안 수립

-(시공분야) 노면복공 평탄성 확보방안, 환경성 제고할 수 있는 노면복구계획 수립

-(교통분야) 지하차도 내 엇갈림구간의 안전성과 통행성 확보를 위한 운영관리계획

④		실무시공사업단 업무 추가 및 보완

- 공구별 제안된 시방, 특별기준 및 규정 등의 검토·조정(협의)

- 경계부 기둥, 보, 벽체, 내부계단 등 일괄시공이 필요한 부재에 대한 공사주체·방법 등 조정

⑤		입찰안내서 작성관련 사항 수정 및 보완

- 질의회신 기간 수정 : 질의마감일 이후 10일 → 7일

※ 장기검토 필요시 7일 이내 중간회신, 14일 이내 최종결과 통보

□ 추가 검토·보완사항 반영

①		재활용수 활용방안 수립

- 재활용수는 복합환승센터 내 청소용수, 지상광장 조경용수 등 활용방안에 대하여 다각적으로 검토하고, 재활용수를 제외한 수량은 하천으로 방류되도록 실개천 조성 또는 전용관로 등을 설치하여 처리

②		BIM 기술 적용지침 추가

- 발주기관 요구사항에 맞춰 설계·시공 단계에 3차원 BIM을 적용하여 데이터 작성

- BIM 실행계획서 제출

- 각 공구별 BIM 운용시 실무시공사업단을 통하여 통합관리

③		실시설계 시 안전대책 및 훈련계획 수립

- 가상시나리오를 바탕으로 착공 전, 공사 중 정기적으로 훈련 시행

- 실시설계 시 관련 매뉴얼 작성 제출

- 노무자 위치 등 실시간 공사현장 확인 가능 시스템 구축 등

④		입찰 · 실시설계 시 제출서류 추가

- 우선시공분 실시설계 및 전체 실시설계에 대한 설계안전성검토(DFS) 보고서 제출

- 실시설계 착수전 책임기술인 및 참여기술인이 포함된 과업수행계획서 제출

⑤		관련기관 협의 및 각종 심의결과 반영

- 환경영향평가 협의결과 반영

▹ 비점오염저감시설 관리·운영, 소음측정기기, 용수공급 및 오수처리계획 등

- 공사기간 적정성 심의결과 반영

▹ 법정공휴일, 근로시간 적용한 공정계획, 멀티칼렌터에 의한 공종별 작업일수 산정

- 수방대책사항 추가 반영

▹ 집중호우 시 노면수의 지하차도 본체 구조물로의 유입 원천 차단

- 재해영향평가 심의결과 반영

▹ 소음·진동, 교통정체를 고려한 시공기간과 시간대 결정

Ⅳ		향후계획

○ '19.12월 : 건설기술심의 조치결과 제출(→ 기술심사담당관)

따로 붙임 : 1. 위원별 채택의견 조치결과 보고서 1부.
2. 방재안전분야 위원(권*효) 검토 확인서 1부.
3. 공구별 입찰안내서(수정본) 1부. 끝.