문서번호	토목부-23014
결재일자	2019.12.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		박일연	12/11 代이동훈
협조

창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역 설계변경(전체2회, 1차2회) 검토보고

2019. 12.

도시기반시설본부

(토  목  부)

창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역

설계변경(전체 2회, 1차 2회) 검토보고

‘창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역’ 의 설계변경(전제 2회, 1차 2회) 요청에 대하여 검토 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역

□ 계약금액 : 1,300,000천원(1차 : 500,951천원)

□ 계약기간 : ’19.04.04. ~ ’20.10.03.(1차 : ’19.04.04 ∼ ’19.12.31.)

□ 계 약 자 : ㈜경동엔지니어링 외 1개사

Ⅱ		주요변경 사유

□ 책임, 분야별(토목) 기술자, 현장 보조원 실근무일수 반영(1차)

**********************************

**************************************

*******************************************

*********************************

Ⅲ		설계변경 내역

□ 투입인원 변경 현황(전체 2회)

***		**	***		***		**** ***********	**
			**	**	**	**
** ****	******	**	*****	*****	*****	*****	*****
	******	**	****	****	****	****	*	***
	중급(토목)	**	*****	*****	*****	*****	*****	***
	******	**	****	****	****	****	*	***
	******	**	*****	*****	*****	*****	*	***
	******	**	****	****	****	****	*	***
	******	**	*****	*****	*****	*****	*****	***
	******	**	****	****	****	****	*	***
	*			*****		****	*****
	****	**	****	****	****	****	*****
	****			*****		*****	*****

□ 투입인원 변경 현황(1차 2회)

***		**	***		***		**** ***********	**
			**	**	**	**
** *******	******	**	****	****	****	****	*****	*
	******	**	****	****	****	****	*****	***
	******	**	****	****	****	****	*	***
	******	**	****	****	****	****	*	***
	******	**	****	****	****	****	*	***
	******	**	****	****	****	****	*****	***
	*			*****		*****	*****
	****	**	****	****	****	****	*****
	****			*****		*****	*****

□ 용역비 및 용역기간 변경 현황

(단위 : 원)

****		****	****	***	****
** ****	***	*************	*************	**********
	****	********** ************.	********** ************.	*	****
** ****	***	***********	***********	**********
	****	********** *************	********** *************	*	****

Ⅳ		조치의견

□ 상기와 같이 ‘창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역’에 대해 설계변경하여,

□ 건설사업관리용역 업무 및 정산에 차질이 없도록 조치하고자 함.

○ 예산과목

- 지속가능한 역사문화도심 구현, 도심역사 문화자원 관리(도시개발특별회계), 창덕궁 앞 도성한복판 역사인문재생사업, 감리비(401-02) : 1,000,000천원

- 안전의식 확산 홍보활동 강화, 재난대비시설 건립(도시개발특별회계), 유휴 지하공간 재생프록젝트 사업, 감리비(401-02) : 100,000천원

- 도로건설, 광역도로 건설(광역교통시설 특별회계), 사가정길~암사동간 도로개설(암사대교 건설), 감리비(401-02) : 200,000천원

따로붙임 : 설계변경내역서(전체, 1차) 1부.  끝.