“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경(타절) 시행 및 변경계약 의뢰

1. 역사도심재생과-13394(2019.12.12.)호와 관련입니다

2. 우리부서에서 시행중인‘을지로 입체보행공간 조성 설계공모 관리용역’에 대하여 아래와 같이 설계변경(타절)하고 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 용역개요

- 용 역 명 : 을지로 입체보행공간 조성 설계공모 관리용역

- 계약기간 : 2019.1.21. ~ 2020.3.31

- 계약금액 : 금98,835,000원

- 계 약 자 : 엠에이건축사사무소 대표 유태림

나. 설계변경(정산) 내역

구 분	당초금액(계약금액)	변경금액(타절금액)	증감	비고
총용역비	98,835,000원	37,895,000원	감 60,940,000원

붙임 : 1. 용역 계약해지 및 타절준공 보고서 1부

2. 설계변경 내역서(타절) 1부

3. 합의각서 각 1부.  끝

	역사도심재생과장
주무관	김영무		도심정책팀장	이기원		역사도심재생과장	12/12 조남준
협조자	계약1팀장	조현
시행	역사도심재생과-13401	(		)	접수		(		)
우	04524	서울시 중구 세종대로 110 역사도심재생과(11층)	/
전화	02-2133-8493	/전송	02-2133-0742	/	moo123@seoul.go.kr	/	부분공개(6)