문서번호	물재생계획과-17319
결재일자	2019.12.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수관리팀장	물재생계획과장
김병오		이한복	12/30 代김준형
협조

2019년 하수도특별회계 이월사업 검토보고

2019. 12.

물순환안전국

(물재생계획과)

2019년 하수도특별회계 이월사업 검토보고

’19년도 편성된 사업(한남빗물펌프장  유역 하수관로 정비 외 32건)에 대하여 불가피한 사유로 집행하지 못한 예산을 이월하여 사업의 계속성을 확보하고자 함

□ 근거법령

○ 지방공기업법 제30조

○ 지방공기업법시행령 제24조

□ 이월사업 대상 현황

○ 총괄현황                                            (단위 : 천원)

구 분		합 계	건설개량 이월	사고이월 대상	비 고
금 액 (건 수)		28,905,656 (33건)	-	28,905,656 (33건)
사유	공사추진중 장애발생	6,653,562 (4건)	-	6,653,562 (4건)
	사전절차 지연	12,191,380 (19건)	-	12,191,380 (19건)
	유관사업지연	236,685 (1건)	-	236,685 (1건)
	사업계획변경	1,322,946 (3건)	-	1,322,946 (3건)
	용역준공기한 미도래	263,825 (2건)	-	263,825 (2건)
	기타	8,237,258 (4건)	-	8,237,258 (4건)

※ 지출원인행위 및 지출액은 ＇19.12.27. 기준 금액, 사고이월액은 현재 추정액으로 최종확정 시 수정예정

□ 사업별 사고이월 내역	33건 28,906백만원

연번	사업명	예산현액	원인행위액	지출액 (12.27현재)	사고이월액			이월 사유
					계	원인행위필	미필
1	한남빗물펌프장 유역 하수관로 정비	1,000,000	750,275	203,960	729,458	546,315	183,143	사전절차 지연
2	성수동2가3동 내수재해위험지구 타당성검토 및 기본계획	117,000	89,862	59,223	30,639	30,639	0	사전절차 지연
3	마장초등학교 주변 하수관망 개선	2,800,000	2,742,952	1,579,555	1,163,397	1,163,397	0	공사추진중 장애발생
4	마장축산물시장 노후불량 하수관로 정비	770,000	754,103	159,354	594,749	594,749	0	사전절차 지연
5	행당동 삼부아파트 주변 수해예방사업	3,900,000	3,899,629	2,867,525	1,032,475	1,032,104	371	공사추진중 장애발생
6	돌곶이로 22길 34-12 외 2개소 하수관로 이설	610,000	576,872	305,934	270,938	270,938	0	공사추진중 장애발생
7	하수박스 안전진단 등 용역	1,300,000	759,263	106,656	648,647	648,647	0	기타
8	자치구 하수도 전문감리	6,000,000	5,485,900	5,197,701	239,564	239,564	0	용역준공기한 미도래
9	답십리1동 내수재해위험지구 타당성검토 및 기본계획	220,000	26,723	2,462	24,261	24,261	0	용역준공기한 미도래
10	방학로5길외 3개소 사각형거 보수보강	2,000,000	1,938,260	523,131	1,415,129	1,415,129	0	사전절차 지연
11	도봉로109가길 외 1개소 사각형거 보강	1,200,000	1,176,372	0	1,176,372	1,176,372	0	사전절차 지연
12	노해로62길 주변 외 2개소 사각형거 보수	752,000	744,300	350,692	393,608	393,608	0	사전절차 지연
13	마들로 주변(A구간) 사각형거 보수	600,000	593,812	0	593,812	593,812	0	사전절차 지연
14	노해로66길 주변 사각형거 보수	1,239,000	1,221,826	0	1,221,826	1,221,826	0	사전절차 지연
15	방학동 723주변 배수개선	200,000	199,100	50,100	149,000	149,000	0	기타
16	노해로70길 주변 오수관로 정비 기본 및 실시설계 용역	310,000	309,674	133,890	175,784	175,784	0	사전절차 지연
17	화랑로 681(태릉선수촌) 주변 노후 사각형거 보수	1,000,000	982,780	0	1,000,000	982,780	17,220	사전절차 지연
18	갈현로 일대 노후하수관로 정비 기본 및 실시설계용역	260,000	260,000	112,980	147,020	147,020	0	사전절차 지연
19	응암동 일대 하수관로 성능향상 사업	600,000	477,233	92,595	487,383	384,638	102,745	사전절차 지연
20	연세로 하수관로 개량	2,000,000	1,339,275	473,968	1,237,483	865,308	372,175	사전절차 지연
21	북가좌동 371-1~385-33 일대 사각형거 보수보강	600,000	421,921	85,580	444,216	336,341	107,875	사전절차 지연
22	응암로 54~가재울미래로2 사각형거 보수	500,000	378,812	120,120	316,832	258,692	58,140	사전절차 지연
23	수색역 하부 하수관로 정비	700,000	544,755	203,076	341,679	341,679	0	기타
24	목동 신시가지 남측 오수관로 정비	5,550,000	4,870,969	1,363,248	4,186,752	3,507,721	679,031	공사추진중 장애발생
25	강서구청사거리~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비	8,199,000	8,006,552	1,101,068	7,097,932	6,905,484	192,448	기타
26	국회대로 27길 18~곰달래로 53길 11 외 5개소 사각형거 보수	1,439,000	1,434,885	1,108,349	330,448	315,334	15,114	사전절차 지연
27	초록마을로 62주변 하수관로 개량	420,000	171,761	0	176,111	171,761	4,350	사업계획변경
28	석촌동15~석촌동235-3번지 주변 사각형거 개량	300,000	297,214	177,214	120,000	120,000	0	사전절차 지연
29	둔촌로 일대 하수관로 신설	18,327,000	18,325,027	18,088,342	236,685	236,685	0	유관사업지연
30	둔촌동역 ~ 중앙보훈병원 주변 사각형거 보수보강	1,800,000	1,710,295	1,098,285	612,010	612,010	0	사업계획변경
31	길동역 ~ 대명초등학교 주변 사각형거 보수보강	1,200,000	1,098,265	563,440	534,825	534,825	0	사업계획변경
32	성내동 미주아파트 앞 교차로~성내도서관 간 사각형거 보수	1,300,000	1,255,760	0	1,285,760	1,255,760	30,000	사전절차 지연
33	노후불량 하수맨홀 정비	1,500,000	1,455,178	992,330	490,861	462,848	28,013	사전절차 지연

□ 행정사항

○ 2019년도 사고이월 요구사업 제출(사업담당 → 예산담당)

○ 이월요구에 대해 ‘20년도 사업관리 철저

붙임 : 이월사업 대상 세부현황 1부.  끝.