문서번호	전시기획과-760
결재일자	2020.2.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		전시기획과장	서울공예박물관장
손호연		채영	02/03 김정화
협조

공예작품설치 지명공모 실무용역 월간 보고[1월]

2020. 1.

서울공예박물관

(전시기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

공예작품설치 지명공모

실무용역 월간 보고[1월]

서울공예박물관 공예작품설치를 위한 실무용역을 수행하고 2020년 1월 추진 현황을 아래와 같이 보고함

□ 추진근거 및 경과

❍ 서울공예박물관 공예인테리어 조성계획 : ’18.11.26

❍ 서울공예박물관 공예작품설치 지명공모 추진계획 : ’19.8.30

❍ 서울공예박물관 공예작품설치 지명공모 실무용역 시행(변경) : ’19.12.16

❍ 공예작품설치 지명공모 실무용역 착수보고회 결과보고 : ’19.12.23

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 서울공예박물관 공예작품설치 지명공모 실무용역

❍ 사업기간 : 2019.12. ~ 2020.12.

❍ 소요예산 : *********

❍ 용 역 사 : ******

❍ 주요 과업 내용

-공예작품설치 지명공모 기획‧운영 총괄

-공모진행 및 작품제작 과정기록

-작품운송‧설치 지원

-작품 유지보수 및 관리안전 매뉴얼 작성

-공모 관련 자료전시회 기획 및 설치, 운영

-기타 사업추진 전반에 관한 사항

□ 추진현황

일 시	2020. 1. 8.(수)
장 소	서울공예박물관 건립현장
참 석 자	‧박물관(1인) : 손호연 주무관 ‧공예작품 실무용역(2인) : ********************
진행내용	- 실무용역팀, 공예작품설치 진행을 위한 현장답사

❍ 실무용역팀 박물관 건축현장 답사 진행

일 시	2020. 1. 12.(일)~16(목)
장 소	*********************************
참 석 자	‧박물관(4인) : 서울공예박물관장 및 전시기획과장 김하연‧손호연 주무관 ‧공예작품 실무용역(2인) : ******************** ‧작가(8인) : ************************* *****************************
진행내용	공예 작품 작업 제작 방향 논의 제작 일정 및 사업 전체 일정(워크숍,보고회) 확인 - 공예 작품에 대한 아카이브작업, 향후 인터뷰 실시 등 안내 - 인테리어 마감 제안사항 수렴 등

❍ 공예작품설치 작가(8인) 작업실 방문

※붙임2. 「공예작품 부문별 설치 방안 조사」참조

일 시	2020. 1. 10(목)
장 소	서울시청 서소문관 4층 서울공예박물관장실
참 석 자	‧박물관(5인) : 서울공예박물관장, 총무과장, 전시기획과장, 박재웅‧손호연 주무관 ‧인테리어 용역(1인) : ****** ‧공예작품 실무용역(2인) : ********************
진행내용	박물관 실내인테리어 기본방향 공유, - 작가 설치 작품 특성 및 설치 고려사항 논의

❍ 공예작품설치 부문 인테리어 회의(1차)

일 시	2020. 1. 20.(월)
장 소	서울시청 서소문관 13층
참 석 자	‧박물관(5인) : 전시기획과장, 김하연‧손호연 주무관, 조아라(홍보)‧김연희(아카이브) 담당주무관 ‧공예작품 실무용역(2인) : ********************
진행내용	아카이브 및 홍보계획 진행 협의 박물관 홍보계획 확인 사업진행 일정표 공유, 업무협조 방법 논의

❍ 홍보‧기록 일정협의 추진

※붙임3. 「공예작품설치 사업 진행 일정 계획(안)」 참조

일 시	2020. 1. 23.(목)
장 소	********
참 석 자	‧공예작품 실무용역(2인) : ******************** ‧외부자문(1인) : ********
진행내용	사업기본 방향 및 작업스케쥴 공유 작가 사전리서치 방향 및 조사범위 협의, 업무분담

❍ 아카이브 담당 에디터 업무협의 추진

❍ 공예작품설치 부문 인테리어 회의(2차)

일 시	2020. 1. 29(수)
장 소	서울시청 서소문관 4층 서울공예박물관장실
참 석 자	‧박물관(8인) : 서울공예박물관장, 총무과장, 전시기획과장, 박재웅‧정희운‧하민아‧이진서‧손호연 주무관 ‧공예작품 실무용역(2인) : ******************** ‧인테리어 용역(1인) : ******
진행내용	박물관 실내인테리어 설계 진행상황 공유, 선정작가 작품 특성 및 설치 고려사항 의견 수렴, 반영

추진실적	추진기간	단계	비중	달성율
용역공정관리 ‧ 착수보고회 ‧ 중간보고회 ‧ 최종보고회	‘19.12.~ ’20.12	실행	6%	2%
공예작품설치 기본계획 전략수립‧환경 분석 ‧ 기본계획수립, 설치공간 분석‧인테리어 협의	’19.12.~ ’20.3	실행	14%	5%
과업이행 : 기록 ‧ 자문회의, 작가워크숍, 보고회 진행 기록 ‧ 공예작가 작품 제작과정, 완료 기록 ‧ 공예작가 인터뷰 영상기획, 촬영 및 편집	’20.1.~ ’20.10.	실행	35%	3%
과업이행 : 전시 ‧ 작가작품 전시회 기획‧콘텐츠 구성 ‧ 전시공간 설계 및 제작설치, 작품 운송 ‧ 전시그래픽, 영상콘텐츠 기획 및 설치 ‧ 인쇄물(전시리플렛,안내서,포스터) 제작	’20.5.~ ’20.10.	준비	25%	0%
과업이행 : 홍보 ‧ 서울공예박물관 홍보계획 수립 및 실행 ‧ 보도자료 작성, 기자간담회 계최 ‧ 온라인 SNS, 오프라인 매체 홍보	’20.5.~ ’20.11.	준비	15%	0%
준공, 과업완료 ‧ 결과보고서 등 성과품 납품(‘20.12.10)	’20.12.	준비	5%	0%

□ 추진실적

※추진기간 및 단계는 일정에 따라 변경 가능

□ 향후계획

❍ 공예작품설치 선정작가 워크숍 사전회의 : ’20. 1. 20

❍ 공예작품설치 선정작가&인테리어 설계회의 : ’20. 2.4/ 2.11/ 2.14

❍ 공예작품설치 선정작가 전체 워크숍 개최 : ’20. 2. 20

붙임 1. 업무현황보고서(1월)

2. 공예작품 부문별 설치 방안 조사

3. 공예작품설치 사업 진행 일정 계획(안)

4. 회의사진.  끝.