문서번호	토목부-2183
결재일자	2020.2.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이성열	박일연	02/03 김용제

“창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역"

물가변동에 따른 계약금액 조정(제1회) 검토보고

2020.02.03.

도시기반시설본부

(토    목    부)

“창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역"

물가변동에 따른 계약금액 조정(제1회) 검토보고

창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역의 계약상대자(**********)로부터 물가변동에 따른 계약금액 조정(제1회) 요청이 있어 이에 대한 검토보고 임.

※ 관련문서 : 감리용역 물가변동 조정요청 건(경동 제 2019-186호)

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역

○ 용역기간 : 2019.04.04. ~ 2020.10.03.(18개월)

○ 용 역 비 : **************************************

○ 계약업체 : 경동엔지니어링 외 1개사(대한콘설탄트)

※ 시설공사 위치 및 규모

- 위  치 : 종로구 돈화문로 등 3개 주요가로

- 규  모 : 도로정비(판석 및 아스콘 포장) 도로폭 6.5~22m, 연장 1,630m

□ 보고 내용

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제22조 및 「용역계약 일반조건」제6절2 등 관련 규정에 따라

○ 물가변동으로 인한 계약금액의 조정요건이 발생하였기에 계약상대자로부터 이에 대한 보고가 접수됨.

- 계약금액 조정요건 : 아래 2가지 조건 동시 충족

① 기준일로부터 90일 이상 경과

② 품목조정율이 100분의 3이상 증감된 경우

- 물가변동 조정방법 : 품목조정율

○ 계약금액 조정신청 사항

물가변동 조정율(A)	4.72%	물가변동경과기간	272일	기준시점(직전조정기준일)		2019.04.04
				비교시점(조정기준일)		2020.01.01
물가변동대상 계약금액(B)		**************		물가변동조정기준일 현재감리원투입현황	전체		34.58인
					계획투입		34.58인
					실투입		34.58인
물가변동적용제외 계약금액(C)		************		물가변동적용대가(D) (B-C=D)	************
선금급공제금액(F)		**		물가변공등락대상 조정금액(G) (A×D=G)	***********
물가변동조정적용금액 (G-F)		***********		기타 참고사항	-

□ 검토의견 및 조치사항

○ 기간 경과 충족 여부 : 적정 (272일 > 90일)

계 약 일	착 수 일	기준시점	조정기준일 (비교 시점)	조정 신청일
’19.04.04.	’19.04.04.	’19.04.04.	’20.01.01.	’20.01.31.

○ 품목조정율 충족 여부 : 적정 (4.72% > 3.0%)

- 물가변동 적용대가 :*************

- 조정기준일 등락폭 합계액 : ***********

- ********************************************

○ 위와 같이 기준시점 이후 90일 이상 경과하고 품목조정율이 3%이상을 총족함으로 관련규정에 의거 물가변동으로 인한 계약금액 조정 대상임으로

○ 추후 통합건설사업관리용역 설계변경시 예산범위 내에서 반영하고자 함.

- 물가변동에 따른 계약금액 조정 금액 : ***********

따로붙임 : 관련 공문 및 물가변동으로 인한 계약금액 조정 보고서 1부.  끝.