문서번호	정보통신보안담당관-26619
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		SNet팀장	정보통신보안담당관
최인호		서재호	11/27 공병엽
협조
	공공와이파이팀장		도찬구

ㄴ

- 스마트서울 네트워크(S-Net) 1차 사업 -

구로구 집행잔액 사용계획 검토보고

2020.11.

정보통신보안담당관

(S-Net팀)

- 스마트서울 네트워크(S-Net) 1차 사업 -

집행잔액 사용계획 검토보고(구로구)

S-Net 1차사업 추진 중 발생한 낙찰차액 등 집행잔액을 이용 공사중 발생한 설계변경 등 구로구의 승인요청 계획을 검토하여 보고 드림

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

○ 서울시-자치구 3차 합동회의 개최 (정보통신보안담당관-19790호/‘20.9.9)

○ 서울시-자치구 4차 합동회의 개최 (정보통신보안담당관-21134호/‘20.9.24)

○ S-Net 구축사업 낙찰차액 사용계획 제출 (정보통신보안담당관-14013호/‘20.10.15)

□ 추진방향

○ S-Net 설계기준 공공생활권 중심 끊김 없는 와이파이 서비스 제공

○ 이면도로, 주택가 설치 AP 4차선 이상 주요도로 및 하천변 산책로에 재배치

○ 주택가 및 사적영역이 공공 와이파이 커버리지에 포함되지 않도록 재배치

□ 추진경과

○ ’20.3월~5월	: S-Net 구별 실시설계 완료

○ ’20.5.27.	: S-Net 자문위원회(제2차, 스마트정보지원센터, 9명)

- 와이파이6 BMT 결과보고, S-Net 1차 사업대상 자치구 선정(5개구)

○ ’20.6.12.	: S-Net 1차사업 자치구 선정(5개구)

○ ’20.6월~8월	: 공사․물품 사전절차 이행, 발주 및 계약

Ⅱ		사용계획(구로구)

□ 사업내역                                              (단위 : 천원)

구 분	사업비 (백만원)			공공 와이파이 (대)			자가 광통신망 (Km)
	계	WiFi	통신망	계	기 존	신 규	계	기 존	신 규
***	*****	***	***	***	***	***	***	***	**

□ 집행잔액 현황                                     (단위 : 천원)

구분	계약일	계약업체	사업기간	배정액	계약액	불용예정액	비고
** **	*********	*****	***************	******	******	*****
**	*********	******	***************	*******	*******	******
**	*********	*******	****************	*******	*******	******
*				*********	*********	*******	***

□ 사용계획 : 증 53백만원                                            (단위 : 천원)

관련건명	변경금액	주요 변경내용	변경사유
**************** **	******* ********	**************** ************** *************** *****************	***************************************************** **************************** ********************** **********************
****************	******* ********	********* *************	*********************** ********************
*	********* ********

Ⅲ		검토의견

□ 설계변경 사유

○ 와이파이 AP 재배치(신규 61개소)에 따른 광케이블 물량 증가

○ 4차선 이상 도로 AP 추가 설치에 따른 물량 증가

- AP 20대, 산업용스위치 32대 증가

○ CCTV 설치 자가망 공사 물량 감소

- 당초 설계 물량은 구로구(스마트도시과) 별도 예산을 편성하여 추진

□ 검토의견 : 조건부 승인 - 첨부 내역서 참조

○ 책임감리를 통해 설계변경 물량 및 금액의 적정성 여부 확인

○ 추가로 물량 증감 발생시 감리 확인을 받아 변경하고 최종 결과 제출

Ⅳ		행정사항

□ 설계변경 및 공사 시행전 통신감리를 통한 행정절차 이행 : 구로구

○ 물량 증감 상세내역, 설계서, 변경사유 등 감리를 통해 확인

□ 최종 설계변경 내역 제출	: 구로구

붙임 : S-Net 낙찰차액 사용계획(구로구)