“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	공사변경계약 체결 보고 및 통보(증산아리수올림터 저압수전에 따른 전기설비공사)

시설관리과-23283(2020. 12. 23.)호 공사 계약 변경 의뢰에 따라 아래와 같이 변경계약을 체결하였음을 보고(통보) 합니다.

1. 계 약 건 명 : 증산아리수올림터 저압수전에 따른 전기설비공사 (담당 : 고동인)

2. 계 약 상 대 : 이티이 주식회사 (대표 : 이일태)

3. 변경계약일 : 2020. 12. 23.

4. 변 경 내 역

구분	계약 변경 정보		증감/비고
	당초	변경
총부기계약금액	76,157,900원	83,700,110원	증 7,542,210원
기 간 변 경	2020. 12. 31. 까지	2020. 12. 31. 까지	변동 없음

5. 변 경 사 유 : 현장 시공여건에 의한 신규공정, 물량변동 발생 및 보험료 정산

6. 보증서 등 추가 수납

구분	변경 내용	비고
계약보증서	보증금액 6,277,513원으로 변경	계약금액의 7.5%

붙임  1. 변경 계약서 1부.

2. 변경 계약 보증서 1부.

3. 계약 체결 서류 각 1부.

4. 변경계약 의뢰 공문 1부. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	구자람		행정관리팀장	代박지수		행정지원과장	박달경		서부수도사업소장	12/28 代박달경
협조자
시행	행정지원과-25762	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	0231463551	/전송	0231463578	/	spirit24@seoul.go.kr	/	부분공개(5)