문서번호	배수과-12204
결재일자	2020. 12. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	배수과장		급수부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
문정주	김원수		신용철		구아미		12/31 백호
협 조
	계획설계과장					송헌영
	주무관					조성균
	주무관					박종혁

2021년 중블록별 무단수 급수체계 구축계획

2020. 12.

상수도사업본부

(급수부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 중블록별 무단수 급수체계 구축계획

누수, 수질사고 등 비상 상황 대비 블록시스템과 정수센터 간 공급망, 주요관로 이중화 등을 통한 안정적 무단수 급수 체계를 구축하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 2030 서울시 수도정비기본계획( ’15. 5. 21. 환경부 고시)

❍ 상수관망 최적화, 무단수 공급체계 구축, 지능형 상수관망 체계 도입

□ 무단수 급수체계 구축사업 추진계획(배수과-4140호, ’17. 5. 18.)

❍ 무단수 급수체계 타당성 조사용역 완료(’16. 12. 24.)

**************************************************************

**************************

*********************

※ 연차별 투자계획

****	***	*** ******	****
			***	***	***	***	***	*****
*******************	***	**	***	***	****	****	****	****
************************	*	*	*	*	*	*	*	*
*******	*****	***	*****	***	***	***	***	*****

Ⅱ		2021년 추진계획

□ 추진개요

❍ 추진목표 : 순환배관 6.5㎞, 유량계 설치 2개소

❍ 사 업 비 : 10,746백만 원

(단위 : 백만원)

계	시설비	감리비	시설부대비
10,746	10,125	611	10

❍ 사업내용

- (사업소)순환배관 300~700㎜, 6.5㎞ 부설 / 유량계 설치 2개소

- (본  부)공동구내 상수도관 복선화 기본계획 용역 시행(32.4㎞)

❍ 기관별 추진계획(단위사업 10건)

**	*	**	**	**	**	**	**	****************************************************************************************
**	**	*	*	*	*	*	*
******	***	***	***	***	***	***	***
********	******	***	*****	*****	*****	*****	*****	***

* 유량계는 북부수도사업소 설치 예정

□ 추진일정

❍ 순환배관 부설 및 유량계 설치

┍ 현장조사, 설계	’21. 1월

┡ 계약심사 및 발주	’21. 2~3월

┗ 공사시행	’21. 4~11월

❍ 사업관련 용역

- 공동구내 상수도관 복선화 기본계획 용역 시행	’21. 1~12월

Ⅲ		행정사항

□ 공정·품질 등 관리(본부)

❍ 주간·월간 사업추진 실적 관리

- (서울시설공단) 주보 제출, (사업소) 월보 제출

❍ 현장별 1회 이상 지도 점검

- 자재, 품질, 안전 등 공사장 관리 실태 순회 점검

□ 세출예산 효율적 집행(사업소)

❍ ’21년 상반기 신속집행 제고

- 발주 사전절차를 적기에 시행하여 조기발주하고 선급금 지급

- 조달청 하도급지킴이(구)서울시 대금e바로)를 통한 월별 노무비 등 지급

- 기타 도로복구비 선납(※ 관리청 복구비 납부 시 단가 적정성 확인 철저)

따로붙임 1. ’21년 중블록별 무단수 급수체계 구축 대상 각 1부.
2. ’21년 중블록별 무단수 급수체계 구축 검토 현황 1부.  끝.