투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	동부도로사업소장
(경유)
제목	(하남선 1-1공구)교통안전시설물 설치공사의 원인자 부담공사 규제변경 승인 및 준공기한 연장 요청

1. 하남선(5호선 연장) 건설사업에 협조하여 주신 귀 사업소에 감사드립니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 『하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사』관련, 교통안전시설물 설치 원인자 부담공사에 대해 규제변경 승인 및 준공기한 연장을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

■ 변경개요

- 변경사유

·상일동역 교차로 주변 개발에 따른 도로 선형변경

·하남선(5호선 연장) 복선전철 건설사업 기간 연장

- 변경내용

·횡단보도 및 신호기 위치 변경

·준공기한 연장 : [당초]`20.12.31 ⇒ [변경]`22.7.31

붙임  1. 관련서류 1부

2. 변경도면 및 내역서 1부(용량 초과로 별도 송부). 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	한재호		토목1과장	최진규		도시철도토목부장	12/31 최병훈
협조자
시행	도시철도토목부-14159	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-772-7126	/전송	02-772-7306	/	jh1004@seoul.go.kr	/	부분공개(5)