코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	노유자시설(병설유치원) 소방시설 소급 설치기간 연장 안내

1. 관련근거

가. 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조 및 별표5

[시행령 부칙(대통령령 제28996호, 2018.6.26.) 제2조]

나. 본부 예방과-27916(2020.12.30.)호 「소방시설법 적용사항 검토 결과 알림」

2. 2018.6.27.자로 개정된 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령에 따라 병설유치원에 대한 스프링클러설비 등 소방시설 소급 설치 기한이 아래와 같이 변경되어 안내하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대    상 : 병설유치원 6개소

나. 추진현황 : 6개소 중 2개소 추진중

다. 변경내용 : 소방시설 설치 기한

변경 전	변경 후
2020. 12. 29.	2021. 12. 31.

라. 변경사유

○ 코로나19 감염병 확산에 따라 잦은 학사일정 변경으로 불가피하게 공사가 지연됨

붙임  1. 병설유치원 소방시설 소급 설치 현황 1부.

2. 병설유치원 소방시설 소급 관련 주요 안내사항 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	신재석		검사지도팀장	김만영		예방과장	전결 12/31 代김만영
협조자
시행	예방과-18101	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동) 동대문소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	madamo28@seoul.go.kr	/	부분공개(5)