문서번호	도로관리과-55
결재일자	2021. 1. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로조명팀장	도로관리과장
박기춘		이관호	01/04 김진효
협조
	주무관		김범철

- 노후 도로조명시설 개량 및 무선원격감시제어시스템 설치 -

2020년 도로조명시설 개선사업 완료보고

2021. 1.

안전총괄실

도로관리과

- 노후 도로조명시설 개량 및 무선원격감시제어시스템 설치 -

2020년 도로조명시설 개선사업 완료보고

노후 조명시설의 통합개량 및 광원개량 사업과 무선원격감시제어시스템 설치 사업을 추진하고 그 결과를 보고드림.

- 감전 등 전기안전사고 예방, 온실가스 감축

- 실시간 원격 감시 및 제어를 통한 효율적 유지관리

Ⅰ		사 업 개 요

□ 노후 조명시설 개량 사업

○ 통합개량 사업(선로, 등주, 분전함, LED광원 교체)

- 대    상 : 시도상 가로등(청계천로 등 30개 노선)

- 규    모 : 선로교체(61km), LED광원 개선(3,912등) 등

- 사 업 비 : 17,871백만 원

○ 광원개량 사업(LED광원만 교체)

- 대  상 : 성동구 등 20개 자치구 방전등(메탈,나트륨) 설치 노선 및 횡단보도 주변

- 규  모 : LED광원교체(18,280등)

- 사업비 : 11,730백만원

□ 무선원격감시제어시스템 설치 사업

○ 가로등 전선로 누전(漏電), 부점등(不點燈) 발생 등 이상 여부를 실시간 감시·제어하기 위한 시스템 구축

- 대  상 : 4개 자치구(성동, 광진, 중랑, 마포)

- 규  모 : 시도상 분전함 347개소

- 사업비 : 650백만원

Ⅱ		예산집행 현황

□ 최종 집행 현황

(단위:백만원)

구 분	예 산 집 행 현 황				비 고 (집행잔액)
	예산현액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (A-B)	집행율 (B/A)
계	30,251	29,373	878	97.1%	- 사고이월액 : 509백만원 - 낙찰차액 등 : 369백만원
통합개량	17,871	17,108	763	95.7%	- 사고이월액 : 509백만원 - 낙찰차액 등 : 254백만원
광원개량	11,730	11,616	114	99.0%	- 낙찰차액 등 : 114백만원
원격감시	650	649	1	99.8%	- 낙찰차액 등 : 1백만원

□ 사고이월

○ 대    상 :  청계천로 노후 가로등 개량공사

○ 금    액 : 509백만원

○ 이월사유

□’20년 6월 설계용역을 준공, 사전절차 이행(빛공해심의, 계약심의) 및 동절기 굴착통제 등으로 절대공기 부족

□ 추가 개량 시행 : 집행 잔액(낙찰차액 등) 2차 재배정

○ 집행잔액 1,347백만원 중 432백만원은 자치구 추진사업에 활용, 915백만원은 회수 후 추가 개량 사업에 2차 재배정

사 업 명	예산현액 (A)	집 행 현 황
		합 계 (A=B+C)	집 행 액 (B)	집행잔액 (C)
합 계	29,501	29,501	28,154	1,347
노후조명시설 통합개량사업	17,871	17,871	16,877	994
광원 및 횡단보도 등기구 개량사업	11,630	11,630	11,277	353

	【집행 잔액 2차 재배정】
- 통합개량사업 : 728백만원 □ 영등포구 대림로 노후 가로등 개량공사 ⇒ 400백만원 □ 종로구 청계천로 가로등 개량공사 ⇒ 240백만원 □ 강서구 방화대로 가로등 개량공사 ⇒ 88백만원 - 광원개량사업 : 181백만원 □ 강남구 광평로 광원 개량공사 : 100백만원 □ 성동구 고산자로·살곶이길 광원 개량공사 : 52백만원 □ 은평구 통일로 중앙차로 광원 개량공사 : 29백만원 - 재배정 잔액 : 6백만원

Ⅲ		사업 추진실적

□ 노후 조명시설 개량

구 분		선로개량 (km)	등주개량 (본)	광원개량 (등)	분전반개량 (면)
계	계획	60.9	2,110	22,192	120
	실적	65.3	2,393	27,469	130
통합개량	계획	60.9	2,110	3,912	120
	실적	65.3	2,393	6,955	130
광원개량	계획	-	-	18,280	-
	실적	-	-	20,514	-

- 낙찰차액 등을 활용한 추가 개량으로 당초 계획보다 광원개량 실적 24% 증가

○ 가로등 단독 분전반 설치를 지양하고 융·복합형 분전반 사용하여 쾌적한 보행환경 조성(융합형 126면, 단독형 4면)

가로등주 통합 분전함(광진구 천호대로)		보행 안내사인 융합 분전함(노원구 노해로)
개량 전	개량 후	개량 전	개량 후

□ 무선 원격감시 제어시스템 설치

구 분	시도상 분전함	시스템 설치현황
		~ ’19년(누계)	’20년	설치율
합 계	652	139	347	75%
성동구	214	-	134	63%
광진구	123	3	120	100%
중랑구	148	-	62	42%
마포구	167	136	31	100%

□ 스마트가로등 시스템 시범설치

구 분	청계천로(종로구) (’21.6월 준공 예정)	방화대로(강서구) (’20.12.월 준공)
연 장	4.1km	2.8km
스마트센서	118개(차량 및 인체감지)	44개(차량감지 및 속도 측정)
게이트웨이	2개(서버와 가로등 통신)	2개(서버와 가로등 통신)
서버 및 프로그램	1 SET	기존 서버 이용
LED등기구	353등	188등
기 타	S-DoT 5세트 RGB보행등 24개, 고보조명 12개 고속 무선충전기 10개 등	S-DoT 2세트
공사금액	1,376백만원	975백만원

□ 온실가스 감축 및 전기요금 절감

전기사용량 절감량 (MWh/년)	온실가스 감축량 (tco2/년)	전기요금 절감액 (천원/년)
11,417	5,057	1,472,793천원

※ 전기사용량 절감량 : 11,417 MWh/년

- 차도등 : 19,602등 × 0.125kW × 365일 × 11h ÷ 103 = 9,838MWh

- 보행등 : 7,867등 × 0.05kW × 365일 × 11h ÷ 103 = 1,579MWh

《 ’21년도 노후 도로조명시설 개량 사업 추진계획 》

○ 통합개량사업

- 대  상 : 종로구 등 18개자치구, 23개노선

- 사업비 : 13,585백만원

대 상	규 모			비고
	LED 광원	가로등주	선로
우정국로 외 22개 노선 (18개 자치구)	2,871등	1,778본	51㎞	15년 이상 경과 노선

○ 광원개량사업

- 대  상 : 중구 등 10개 자치구(LED 미교체 노선)

- 사업비 : 3,185백만원

- 규  모 : 4,591등(LED 광원 교체)

붙 임 : ’20년 노후도로조명시설 개량사업 추진 결과 1부. 끝.