문서번호	급수운영과-41
결재일자	2021. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
정준석	임인택	한희선	01/04 안병희
협 조
	시설관리과장		代김주경
	급수관리팀장		代제영도
	시설운영팀장		代한호진
	주무관		한호진

2021년 소블록 배급수관망 개선사업 추진 계획

2021. 1.

강동수도사업소

2021년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

건강하고 맛있는 아리수를 단수 또는 정체없이 공급하기 위한 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획임.

Ⅰ		추진근거

○ 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획 변경(본부장방침, 2016.8.23)

○ 2021년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획(누수방지과-9548, 2020.12.29)

Ⅱ		세부 정비 계획

□ 사업대상: 40개소

□ 사 업 비: 2,100백만원

□ 사업기간: 2014년~2023년

□ 사업목적

○ 단일배관 이중화로 무단수 급수체계 구축

○ 단절구간을 순환관망으로 형성하여 깨끗한 아리수 공급

《 단일배관 이중화 》

《 단절관 순환관망 》

	➡

□ 현재까지 추진실적

구 분	합계	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년	비고
사업비(백만원)	1,360.25	8.25	268	200	237	280	285	82
대상(개소)	27	1	4	1	6	3	4	8
연장(m)	2,189	15	459	260	454	450	466	85

□ 2021년 추진계획

○ 정비대상: 4건, 41m(단절관 순환관망)

○ 정비예산: 31백만원

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(소블록 배급수관망 개선)

○ 세부 정비내역

연번	위 치	관로번호	구경(mm)	연장(m)	비 고
	합 계		80~100	41
1	송파2동 4-1	66804000031	100	5
2	가락본동 16-24	67821121650	100	6
3	삼전동 19	66783123697	100	10
4	둔촌2동 51-10(39)	67241120770	80	20

○ 사업추진 방법

- 건별 소규모이며 산재되어 있어 급수공사 연간단가 계약업체로 시행

- 굴착연장이 10m 이상인 경우 21년 상반기 도로굴착 심의에 반영

- 지장물 등으로 공사불가 시 대상을 변경하여 100% 목표달성 추진

- 도로굴착 승인 등 사전준비를 철저히 하여 가급적 상반기 이내 정비

Ⅲ		행 정 사 항

○ 추진실적 보고: 매월 10일, 본부 누수방지과

○ 현장조사 실시(지역 담당): ’21. 2.

○ 도로굴착 승인요청: ’21. 3.

○ 공사착공 및 준공: ’21. 3. ~ 9.

붙임  2021년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획(본부) 1부.  끝.