투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(사토 실정보고 보완서류 검토의견 송부(7차))

1.업무지시현장 : 광역소공인 특화지원센터 건립공사 주식회사 포스코에이앤씨건축사사

무소, 광역소공인 특화지원센터 건립공사 세이브건설 주식회사

2.작 성 일 자 : 2021-01-04 14:01:02

3.지 시 내 용

1). 광역 CM-068(20.12.08)호와 관련임.

2).위와 관련 귀 건설사업관리단에서 제출한 사토(위치 및 수량) 실정보고에 대하여 아래와 같이 재검토를 요청하오니 이른 시일내에 보완하여 주시기 바랍니다

①.흙막이벽체 시공법이 설계(SCW) 및 적용(CIP)에 대한 착오가 있다는 내용으로 이를 구체적으로 입증할 자료 보완

②.흙막이벽체 시공법 적용의 설계도서 착오는 설계계약상대자의 기술자의 확인서가 첨부되어야 할것이며, 설계(SCW)시 이토처리 발생량의 35%만 토사로 적용한다는 기준을 설계발주 기준에 부합하는 기준의 근거자료 제출

③.사토운반 거리 변경은 당초 설계시 선정한 사토장을 변경하여야 하는 구체적인 사유를 보완하여 주시고, 사토장으로 선정된 장소(경기 포천)는 비교대상인 장소(김포 대곳)보다 거리는 멀고 운반시간은 짧다는 이유로 선정하였는데 운반시간(t1,t2) 차에 대한 구체적인 자료를 보완하여 주시기 바랍니다.

3).또한 사토장 선정은 토사반출의 시급성을 감안 운반시간(t1,t2)에 대한 자료를 보완하여 주는 조건을 부하여 우선 승인코자 하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.  끝.

주무관							김성권			의료시설과장					차무흥					건축부장					01/04 이창구
협조자				주무관						김재호
시행			건축부-64									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2648						/전송			02-3708-2659					/	sssggk@seoul.go.kr												/	대시민공개