문서번호	급수운영과-243
결재일자	2021. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		중부수도사업소장
박용석	박장진	채재일		01/05 代김현숙
협 조
	시설관리과장		김상웅
	시설운영팀장		代김종수

『2021년 장기사용 배급수관 및 잔여 노후상수도관』

정비추진 계획보고

2021. 01.

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 장기사용 배급수관 및 잔여 노후 상수도관 정비 추진계획

장기간 사용한 상수도관중 관내부 도장재 탈락 등으로 수질사고 위험이 높은 배급수관을 정비하여 최적의 관망환경을 조성하고, 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하고자, 2021년도 장기사용  배급수관 및 잔여 노후 상수도관 정비사업 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

□ 관련 근거

○ 2021년 장기사용 배급수관 정비 계획 『누수방지과-9546호 ‘20.12.29.』

○ 2021년 노후 상수도관 정비시행 철저 『누수방지과-9566호 ‘20.12.29.』

□ 상수도관 정비 현황(2020년말 기준)

(단위 : km)

구분	총연장	정비연장	잔여구간	비고
장기사용 배급수관 (DP)	32.0	3.5	28.5	2020년부터 정비시작하여 연도별 정비추진
노후 배급수관 (CIP)	24.4	23.2	1.2	2020년 종료후 잔여구간은 장기관리

□ ‘21년 장기사용 배급수관 및 잔여 노후 배급수관 정비사업 향후 계획

○ 정비대상 상수도관 현황                                               (단위 : km)

구분	정비계획 (84~86 DP 및 84년 이전 잔여 노후관)			비고
	계	’21년	’21년이후
*	****	****	*****
***********	****	****	****	84년 이후 상수도관(DP)
***********	***	****	****	84년 이전 상수도관(CIP)

Ⅱ		세부 추진계획

□ 추진방법

○ 사업기간 : 2021년 3월 ~ 11월 (우기 굴착통제 7월~8월)

○ 장기사용 배급수관정비 단위사업 발주 및 노후관정비 연간단가 업체에서 정비 시행

○ 서울시 시설관리공단 및 대한콘설탄트 위탁감독 시행

○ 녹에 취약한 노후 상수도관은 굴착통제여부에 따라 연도별 정비시행(장기관리)

□ 2021년 장기사용 배급수관 정비사업

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
******		******	*****	*****
*	*********************************	******	*****	*****	*****
*	**********************************	******	*****	*****	*****
*	**************************************	******	*****	*****	*****
*	*********************	******	***	***	***** *****

□ 잔여 노후 배급수관 정비계획

연번	위 치	연장(km)	향후 정비계획	비 고
*********		***
*	*********************	****	*******************************	***** **********
*	*********************	****	******************************** **********	*****
*	*************************	****	****************************	*****
*	************************	****	*********************************	*****

○ 잔여 노후 배급수관 총 4건중 1건은 굴착통제가 해제되는 2021년 연간단가공사로 우선정비, 나머지 3건은 구청 유관기관 병행 정비와 굴착 통제로 정비시(2025년)까지 장기관리 예정.

※ 장기관리 구간(3건) 정비전 관리방안

- 정비전까지 해당구간 누수예방을 위해 주변 상시 누수탐지 시행.

- 주기적인 물세척 및 주변지역 정기적인 수질검사 실시

- 노후관 구간 취약기간(해빙기등)동안 시설물 순찰 집중 점검

□ 향후 일정

○ 2021년 장기사용 배급수관 발주공사 3건 : 배급수관 중구 1건, 성북구 2건

○ 도면 심사 및 설계(완료)  : ‘21. 1. ~ 2.

○ 교통소통대책 용역 발주  : ‘21. 2. ~ 4.

○ 본청 계약심사 및 발주   : ‘21. 2. ~ 3.

○ 공사계약 및 착공        : ‘21. 3. ~ 4.

○ 공사준공                : ‘21. 11.

Ⅲ		행정사항

□ 도로굴착 승인 등 공사시행을 위한 사전 준비 철저

□ 매월 공사추진 실적 본부 보고(누수방지과)

□ 공사 완료후 준공사항(공사개요, 위치도 등) GIS자료 제출 철저. 끝.