코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울주택도시공사 사장(사회주택금융기획부장)
(경유)
제목	리모델링 사회주택(보조금 지원형) 대행사업비 정산기한 연장 요청에 따른 회신

1. 서울주택도시공사 사회주택금융기획부-3791(2020.12.31.)호와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 요청한 「리모델링 사회주택 대행사업비 정산기한 연장 요청」에 대하여 아래와 같이 회신하오니, 기한내 정산이 완료될 수 있도록 사업관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 요청사항 : 리모델링 사회주택(보조금 지원형) 정산기한 연장 요청

나. 요청사유 : 착공시 선금(70%)을 지급하고 준공시 잔금(30%)을 지급하고 있으나, 기존 사업 중 3개소가 준공하지 않아 기한내 정산이 어려움

연번	사업지	사업자선정	보조금약정쳬결	준공예정
1	광진구 중곡동 68-2	’19.10월	’20.2월	’21.6월
2	은평구 증산동 202-25	’19.10월	’20.2월	’21.3월
3	동작구 노량진동 206-14	’19.12월	’20.3월	’21.3월

다. 회신내용 : 사업 준공 지연에 따라 ’20년 리모델링형 사회주택 대행사업비 정산기한을회계연도 종료 10일전에서 ’21.6.30. 까지로 연장함.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박현희		주택공급총괄팀장	박서영		주택공급과장	01/06 임춘근
협조자
시행	주택공급과-190	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 씨티스퀘어 14층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-6283	/전송	02-2133-0751	/	35hyunhee@seoul.go.kr	/	대시민공개