투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 건설폐기물처리용역)

우리 부에서 시행 중인「창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 건설폐기물처리용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 건설폐기물처리용역

2. 위    치 : 종로구 돈화문로 외 5개소

3. 용역규모 : 건설폐기물 운반 4,801㎥, 건설폐기물 처리 10,890톤

4. 계 약 자 : 금강도시환경(주)

5. 계약금액 : 금374,810,000원(금삼억칠천사백팔십일만원)

6. 준공기한 변경내역

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
용역	’******************** ******	’******************** ******	*******	금 액 변경없음

7. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 도급계약자 귀책사유 없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 본 공사 준공기한 연기에 따른 건설폐기물 처리용역 준공기한 연기

따라붙임 1. 준공기한 연기 검토보고서(방침서) 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 감리단 및 시공사 관련서류 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이성열		광역도로과장	박일연		토목부장	11/29 김용제
협조자
시행	토목부-21938	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	san730@seoul.go.kr	/	부분공개(5)