문서번호	영동대로복합개발추진단-9469
결재일자	2020. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	사업총괄과장	영동대로복합개발추진단장
김선만	김형건	12/29 이승석
협 조
	재무예산과장		홍은미

『영동대로 지하공간 복합개발사업』

지하안전영향평가 용역 준공기한 연기 검토보고

2020. 12.

『영동대로 지하공간 복합개발사업』관련

지하안전영향평가 용역 준공기한 연기 검토보고

「영동대로 지하공간 복합개발사업」의 지하안전영향평가용역 추진 중 국토교통부 요청사항의 반영을 위해 준공기한을 연기하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 :「영동대로 지하공간 복합개발사업」관련 지하안전영향평가 용역

○ 용 역 비 : 금151,320,500원

○ 용역기간 : '18.5.10. ∼ '20.12.30.

○ 계 약 자 : ㈜대한콘설탄트

□ 추진현황

*************************************

********************************

**********************************************************

***************************************

*****************************************

*****************************************************

******************************************

******************************************

□ 검토내용

○ 계약상대자 의견

- 국토교통부의 지하안전영향평가서 보완요청에 대하여 관계기관 협의 및 보완기간(약3.0개월 소요)이 소요되어 용역 준공기한 연장 필요.

***********************************************************

○ 검토의견

- 계약상대자의 과업기간 연장 요청이 타당한 것으로 판단되므로 준공기한 연장에 동의코자 함.

□ 조치계획

○ 준공기한 연기 시행

- 당초 : ‘18.5.10 ~ ’20.12.30

- 변경 : ‘18.5.10 ~ ’21.03.30 (3개월 연장)

○ 계약기간 연기사유

- 연기사유 : 국토교통부 협의 및 보완사항 반영을 위한 과업기간 부족

- 귀책소재 : 서울특별시

- 지체상금 : 미부과

붙임   1. 관련공문 1부.

2. 준공기한 연기 합의서 1부.

3. 준공검사원 취하서 1부.  끝