문서번호	물순환정책과-23098
결재일자	2020. 12. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물순환정책팀장	물순환정책과장
김소연		이웅희	전결 12/30 김재겸
협조

「한강수질관리종합대책수립」

용역 계약변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

물순환정책과

「한강수질관리종합대책수립」용역 계약변경 보고

용역 과업 중 가장 중요한 부분을 차지하는 강우시 서울 지천의 수질·유량 모니터링 지점 선정 지연으로 1차년도 계약기간을 변경하여 용역을 추진하고자 함

1		용역개요

□ 용 역 명 : 한강수질관리종합대책수립

□ 용역기간 : ‘20.9.14. ～  ’20.12.31.(1차년도)

□ 총 계약기간 :  ‘20.9.14. ～  ’22.3.7.

□ 과업내용

□ 강우시 수질·유량 모니터링을 통한 지천별 오염부하량 산정

□ 그간 수질개선 성과에 대한 구체적 평가 및 정리

□ 수질 목표설정 및 종합적인 지천별 수질 관리방안 제시

□ 계약금액 : 금삼억오천만원정(금350,000,000원)

□ 총 계약금액 : 948,880,000원

□ 계약업체 : 주식회사 동일기술공사

□ 계약방법 : 수의계약(2회 유찰에 따른 수의계약)

□ 예산과목 : 물순환안전국, 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 물환경개선 및 관리,한강수질관리종합대책, 시설비및부대비, 시설비

2		변경내역

□ 계약기간 변경

구 분	당 초	변 경 후
계약기간 (1차년도)	2020.9.14.~2020.12.31.	2020.9.14.~2021.12.31.

3		변경사유

□ 현장 수질 모니터링 지점 선정 지연

□ 보다 정확하고 실효성 있는 모델링을 위해 모니터링 실시 전 조사지점 및 방법 변경

구 분	당 초	변 경 후
조사횟수	청천시 360회, 강우시 600회	강우시 960회

※ 청천시는 기존 수질측정망 자료 활용

□ 지천 합류지점, 강우시 오염물질 배출 우려 토구, 빗물펌프장 등 조사 가능여부 확인을 위한 현장 확인 기간 필요

□ 2021.1월중 착수보고 및 현장 모니터링 시행 예정

4		향후계획

□ 계약변경 의뢰 : ‘20.12.30.(재무과)

□ 용역 준공     : ‘21.12.31.

붙임 : 합의각서 1부.  끝.