코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(한강수질관리종합대책수립 용역)

1. 물순환정책과-23098호(2020.12.30.)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진중인 “한강수질관리종합대책수립 용역”에 대하여 아래와 같이 계약변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 한강수질관리종합대책수립 용역

나. 용역기간 : 2020.09.14.∼ 2020.12.31.(1차년도)

다. 계약금액 : 금350,000,000원

라. 계 약 자 : 주식회사 동일기술공사

마. 계약변경 내용

구 분	당 초	변 경
계약기간 (1차년도)	2020.9.14.~2020.12.31.	2020.9.14.~2021.12.31.

바. 변경사유 : 현장 수질 모니터링 지점 선정 지연

사. 예산과목 : 물순환안전국, 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 물환경개선 및 관리, 한강수질관리종합대책, 시설비및부대비, 시설비

붙 임 : 1. 용역계약변경 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	물순환정책과장
주무관	김소연		물순환정책팀장	이웅희		물순환정책과장	12/31 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-23110	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문별관8층	/
전화	02-2133-3859	/전송	02-2133-1041	/	kimsy78@seoul.go.kr	/	부분공개(5)