문서번호	토목부-76
결재일자	2021. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
윤효진		최진우	01/04 김용제
협조
	주무관		이상근

건설사업관리용역 발주 계획(4차)

(신림공영차고지(저류조포함)건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역)

2021. 1.

도시기반시설본부

(토 목 부)

건설사업관리용역 발주 계획(4차)

(신림공영차고지(저류조포함)건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역)

“신림공영차고지(저류조 포함) 건설공사” 건설사업관리용역에 대하여 전체 계약범위내에서 금차(4차) 발주하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 신림공영차고지(저류조포함)건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 위    치 : 관악구 신림동 140-2번지 일대

○ 용 역 비 : 3,569,000천원

○ 기    간 : 2018. 4. 2. ~ 2023. 12. 31.

○ 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외 2

Ⅱ		추 진 경 위

○ '18.02.12. : 건설사업관리용역 계약 체결

○ '18.10.01. : 책임건설사업관리기술자 투입

○ '21.01.05. : 건설사업관리용역(4차) 착수

○ '21.12.31. : 건설사업관리용역(4차) 준공(예정)

Ⅲ		발 주 계 획

○ 용역금액 및 기간

구 분	전 체	기시행	금 차(4차)	장 래	비 고
**** ****	*********	*******	*******	*********
****	***********************	***********************	***********************	***********************

○ 금차(4차) 건설사업관리기술자 배치계획

등 급 (직급)	분 야	2021년도													개 월	비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
특급기술자	토목														12	********************
고급기술자	토목														10	********************
중급기술자	토목														10	********************
중급기술자	안전														10	********************
고급기술자	전기														1.45	*******************

○ 추진일정

- '21.01.04. : 용역계약(4차)의뢰(토목부 → 총무부)

- '21.01.05. : 용역착수(4차)(예정)

Ⅳ		조 치 의 견

○ 상기와 같이 신림공영차고지(저류조 포함) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역에 대하여 전체 계약금액 내에서 금차(4차)용역을 발주하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.