문서번호	시설관리과-367
결재일자	2021. 1. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	급수운영과장		강남수도사업소장
김재영	김근태	최춘근		01/07 박창석
협 조
	급수관리팀장		전동근
	주무관		홍정식

‘21년 노후밸브 정비 계획

2021. 1

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 노후밸브 정비계획

상수도 밸브의 내구성 향상 및 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위한 2021년 노후밸브 정비 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		사업 현황

□ 관련근거

❍ 노후밸브 정비 중장기 추진계획 변경(본부장 방침 제117호. ‘07.7.3)

❍ ‘21년 노후밸브 정비 추진계획[시설과-10452(2020.12.31.)]

□ 사업개요

❍ 사업 내용: 고장 또는 녹물발생 우려가 있는 ’94년 이전 회주철 밸브 정비

❍ 사업기간: 2008 ~ 2027년

❍ 연도별 정비실적

구 분	계	‘08~’18	‘19	‘20	‘21	‘22년 이후
정비수량(개소)	8,282	4,092	565	440	155	3,030
소요예산(백만원)	66,130	18,330	4,426	3,440	1,251	38,683

※ ‘20년 정비실적: 440건/목표:430건(정비율 102%)

Ⅱ		추진 계획

□ ‘21년 노후밸브 정비계획(노후 소화전밸브 포함)

❍ 정비 대상: 363개소(노후밸브 155, 노후소화전밸브 208개소)

❍ 사 업 비 : 1,667백만원(노후밸브 1,251, 노후소화전밸브 416백만원)

❍ 사업기간 : 2021. 1 ~ 2021. 12

□ 추진 방향

❍ 소ㆍ중블록 단위의 노후밸브 우선 정비

- 재개발ㆍ재건축 지역은 제외

- 노후 상수도관(송배수관, 배급수관) 정비 대상구간은 해당사업으로 정비

- 단가계약(시설물 설치 및 보수, 급수공사) 사업에 반영하여 정비

❍ 대구경 노후밸브 정비

- 대규모 단수로 인한 민원 예상 지역은 부단수공법(라인스토핑)을 활용

- 단가계약사업 계약 시 부단수공종 반영(필요시 단위사업 발주)

- 대형제수밸브 점검정비용역 결과 지적사항 우선 정비

❍ 소방재난본부 관리대상 소화전용 노후밸브 정비

- 노후 상수도관(송배수관, 배급수관) 정비, 소블록 배급수관망 개선,

단가계약(시설물 설치 및 보수, 급수공사) 사업에 반영하여 정비

- 지하식 소화전 밸브실은 적벽돌 쌓기가 생략된 ‘소화전실(축소형) 설치

- ‘소화전 설치ㆍ보수 사업’ 예산과 구분되므로 분리 집행

□ 추진 일정

- ‘21. 01. ~ 02. : 현장조사 및 도로굴착 협의

- ‘21. 03. ~ 11. : 작업실시

- ‘21. 03  ~ 12. : GIS 현장조사서 작성 및 제출

Ⅲ		행정 사항

❍ BSC 성과관리 대상사업으로 사업소 목표관리 ⇒ 사업소 경영실적평가에   반영, 분기별 목표관리(붙임1)

(단위 : 개소)

구 분	계	1분기	2분기	3분기	4분기
총 계	155	20	50	55	30

❍ ‘노후밸브 정비’ 실적 월보 : 익월 10일까지

- 분기별 목표수량을 고려하여 정비 시행

❍ ‘소화전용 노후밸브’ 정비 실적

- 전분기 실적을 다음분기 시작 월 10일까지 제출

- ‘20년 정비실적 제출

붙임 1. ‘21년 노후밸브 정비 사업소별·분기별 목표관리 현황 1부.

2. 400mm 노후밸브 정비계획 1부.

3. ‘21년 노후밸브 정비 실적 제출양식(월보) 1부.

4. ‘21년 소화전용 노후밸브 정비 실적 제출양식(분기) 1부.

5. ‘20년 소화전용 노후밸브 정비 실적 제출양식 1부.  끝.