“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	공원녹지과-411		★주무관	공원기획팀장		공원녹지과장		도시환경국장		부구청장
			최형인	주동희		김현경		안재혁		전결 01/07 안준호
등록일자	2021.1.7.
결재일자	2021.1.7.
			협조자
공개구분	대시민공개
					행정국장		이수진
					재무과장		지영애
					계약팀장		한혜란

2021년 청룡근린공원 재정비사업 추진계획

2021. 1.

	강 남 구
	공원녹지과

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률」시행령 제25조 제1항 제5호 • 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정자치부 예규 제70호, 2016. 11. 14.)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 산출근거 : 엔지니어링사업대가의 기준 중 "공사비요율에 의한 방식“ (산업통상자원부 고시 제2019-20호, 2019년 1월 28일)
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 수혜자 및 수혜범위 : 지역주민 및 일반시민 등
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( O ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

2020년 청룡근린공원 재정비사업 추진계획

양재천변에 위치하여 이용률이 높은 청룡근린공원의 노후 공원시설을 전반적으로 재정비하여, 안전하고 쾌적한 공원환경을 지역주민들에게 제공하고자 함.

Ⅰ		사 업 개 요

사 업 명 : 2020년 청룡근린공원 재정비사업

대 상 지 : 청룡근린공원(개포동 649-1) ※ 행정동 : 개포1동

사업규모 : 약9,367.0㎡

사 업 비 : 349,712천원(구비)

▶ 실시설계 18,381천원, 시설공사 331,331천원

사업내용 : 쉼터 조성, 나대지 식재, 휴게시설 및 운동시설 정비 등

Ⅱ		공 원 현 황

위    치 : 개포동 649-1(시유지)

면    적 : 9,367.0㎡(폭 20m x 연장 470m)

조성년도 : 1998년

주요시설 : 정자 3개소, 목교 2개소, 체력단련기구 17대, 의자 32개

주요민원 : 노후 운동기구 교체, 나지 정비, 경계 담장 개방(공원 – 경남아파트)

정비실적 : 2015년 정비 ※ 일부 시설만 소규모 정비, 식재 X

▶ 산책로 흙콘크리트 포장, 목교 2개소 교체 등

흙콘크리트 포장 전/후		목교 교체 전/후

Ⅲ		추 진 계 획

추진기간 : 2020. 1. ~ 6.

추진방법 : 도면작성용역 -> 시설공사

< 도면작성용역 >

․ 용역기간 : 착수일로부터 40일

․ 용 역 비 : 금18,381천원

․ 계약방법 : 수의계약

․ 사    유 : 소요될 금액이 소액으로, 경험이 풍부한 조경설계 전문업체와 수의계약

․ 관련근거 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항 5호

< 시설공사 >

․ 공사기간 : 착수일로부터 60일

․ 공 사 비 : 금331,331천원

․ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

․ 참가자격 : 건설산업기본법에 의한 조경공사업 면허소지업체로서 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체 ※ 설계결과에 따라 공사금액 및 참가자격 변동될 수 있음

소요예산 : 349,712천원(구비)

예산과목 : 공원녹지과, 도시개발, 공원조성 및 정비, 청룡근린공원 재정비, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		추 진 일 정

2020. 1. ~ 2.  : 도면작성용역 시행

2020. 3.        : 공사 발주

2020. 4. ~ 5.  : 공사 시행

붙임 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 용역설계서 1부.  끝.