투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울지방국토관리청장(하천계획과장)
(경유)
제목	한강협력계획 한강관광자원화 사업 협약기간 연장 요청

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 청과 우리 본부 간 체결한 “한강 관광자원화”에 따른『여의샛강 유지유량 확보』,『홍수방지 및 나들목 개선』사업에 관한 협약에 대한 기간 연장을 요청하오니   처리하여 주시기 바랍니다.

가. 협약 기간 연장 내용

○ 제5조(사업기간)

- 당초 2020.12.31. → 변경 2021.12.31.

나. 협약 변경에 따른 향후 계획

○ 협약 완료 후 잔여 예산 반납 처리 등

붙임  1. 한강 관광자원화 사업 협약 변경 협의자료 1부.

2. 변경 협약서(안) 1부.

3. 기존 협약서 1부.

4. 신구협약대비표 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김태규		치수과장	전결 01/06 양돈욱
협조자
시행	치수과-81	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0651	/전송	02-3780-0744	/	mgsilang@seoul.go.kr	/	대시민공개