문서번호	박물관과-245
결재일자	2021. 1. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한식문화공간조성추진반장	박물관과장
남광연		이병두	01/08 이성은
협조

『삼청각 별채 리모델링 공사』

철거공사 실정보고 검토보고

2021. 1.

문 화 본 부

(박물관과)

『삼청각 별채 리모델링 공사』

철거공사 실정보고 검토보고

『삼청각 별채 리모델링 공사』와 관련하여 철거공사 물량 증가에 관한 실정보고가 접수되어 이에 대하여 검토하여 보고함.

□ 공사개요

○ 위    치 : 서울특별시 성북구 대사관로 3외 3필지

○ 규    모 : 지하1층/지상1층, 5개동, 총연면적 1,003㎡

○ 공 사 명 : 삼청각 별채 리모델링 건축공사(기계포함)

○ 시 공 사 : ㈜현강종합건설 외1

○ 공사기간 :***************************

○ 계약금액 : *********

○ 공정현황 : 철거공사 진행 중

□ 실정보고 검토내용

○ 관련근거

- 공사계약 일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 현강 제20*******01호(2021.01.05.) 실정보고 승인요청

○ 실정보고 사유

- 도면과 현장 여건 상이로 인한 철거 물량 증가

▪ 기존 벽체 구조가 현황 도면과 상이(도면: 건식벽 → 현장: 조적벽)로 인한 조적벽체 철거 물량 및 화장실 타일, 무근콘크리트 철거 수량 증가

- 각 별채에서 폐기물 소운반 및 상차 비용 누락

▪ 현장 여건상 폐기물 인력 운반 및 상차가 불가피 함에 따라 운반비 반영

□ 실정보고 검토내용

○ 실정보고 내용

**********************************************************************

*****************************************

○ 공사비 검토****************

*****		****			****			*************
		**	**	*****	**	**	*****
** *** ******	*****	***	*******	*********	***	*******	*********	*************
	*****	***	******	*********	****	******	*********	*************
	*******	****	*****	*********	****	*****	*********	*************
	*********	*	*	*	****	*******	*********	*************
	*******	*	*	*	*****	*******	*********	*************
	*******	*			*			(****)
	********	**********			**********			*************
***		**********			**********			**************
***		*********			*********			**************
**		**********			**********			*************

○ 적용단가 검토

- 수량 증감 항목: 기계약단가 적용

- 신규항목: 표준품셈에 의거 산출한 단가에 낙찰율******** 적용

□ 감리자 검토의견

○ 본 건물은 일부 공간이 필요에 따라 수리를 하면서 보유하고 있는 도면과 현황이 불일치하는 부분이 많으며 그에 따라 공사중 철거 물량 증가 및 폐기물 소운반 등 변경사항이 발생하였고, 관련 자료 검토결과 이상없이 반영된 것으로 판단됨

□ 처리의견

○ 감리자 검토의견에 따라 공사의 시급성을 고려하여 실정보고에 대하여 우선 승인하여 공사 시행하고, 도급공사비 변경은 추후 설계변경 절차에 따라 계약 변경 조치하고자 함

붙 임   삼청각 별채 리모델링공사 실정보고 승인요청 1부.  끝.