코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울지방국토관리청장(하천계획과장)
(경유)
제목	하천점용 허가기간 연장 신청(서부간선지하도로 민간투자사업)

1. 하천계획과-3107호(2020.7.30.)와 관련입니다.

2. 서울지방국토관리청 서울제1480-2호(2017.8.16.)로 승인받아 공사 중인 「서부간선지하도로 민간투자사업」의 준공기한이 당초 2021.2.28.에서 2021.8.31.로 연기되어 붙임과 같이 하천점용허가기간 연장을 신청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 하천점용허가기간 연장신청서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김정식		민자사업팀장	안준수		도로계획과장	01/08 권완택
협조자
시행	도로계획과-360	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-8073	/전송	02-2133-0763	/	kjungsik@seoul.go.kr	/	대시민공개