문서번호	정수시설과-370
결재일자	2021. 1. 12.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김응균		전훈	01/12 조성태
협 조
	주무관			조광호
	주무관			김동재

「제1,2정수장 송수실」

방배계통 송수펌프 교체공사 발주계획

2021.1.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

「제1,2정수장 송수실」

방배계통 송수펌프 교체공사 발주계획

현재 시행중인「암사 방배계통 송수펌프 제작구매 」사업과 관련하여 납품 후 철거·설치에 필요한 공사업체를 선정하여 사업시행에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사업개요

□ 관련근거

○ 정수시설과-2715(’20.3.3.)호 “정수장 송수펌프 교체계획”

**************************

******************

**	*****	*****	*****	*****	*****	****
**	****	*	*******	***	*******	*******

******************

**	*****	*****	*****	*****	*****	****
****	*****	*	*******	***	*******	*******
**	****	*	*******	***	*******	*******

□ 그간의 진행사항

○ ’20. 03. 17. : 방배계통 송수펌프 제작구매 조달발주(종합낙찰제)

****************************************

*************************************

○ ’20. 09. 10. : 착수계 제출

○ ’20. 10. 19. : 승인도서 제출

○ ‘20. 10. 23. : 승인도서 보완 제출 요청(지시)

○ ‘20. 11. 27. : 승인도서 보완 제출 독촉 요청(지시)

○ ‘20. 12. 03. : 승인도서 보완 제출

○ ‘20. 12. 09. : 승인도서 승인 통보

○ 공 정 율 : 44%( ’21.1.11. 현재)

Ⅱ		발주계획

□ 암사 방배계통 송수펌프 교체공사

○ 대상지 현황

*******************************

********************************************

○ 사업기간 : ’21. 1. ～ ’21. 5.

○ 펌프 설비도 및 현장사진

교체구간

************		************

******************

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 건설산업기본법에 의한 기계설비공사업 등록을 필하고 주된 영업소의 소재지가 서울특별시에 소재한 업체

▸관련근거 : 지방계약법 시행령 제20조 1항 6호 및 같은법 시행령 제13조 1항 1호

○ 추진일정

- ’21.  1. : 발주방침 수립

- ’21.  1. : 계약심사(본부 안전조사과)

- ’21.  2. : 발주 및 계약(본청 재무과)

- ‘21.  5. : 착공 및 준공

□ 공통사항

*************************************************************

붙임 : 설계도서(내역서, 산출서, 시방서, 견적서 등) 1부. 끝.