문서번호	급수운영과-529
보존기간	년
결재일자	2021. 1. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
서장원	서규석	이용구	01/12 박병성
협 조
	시설관리과장		고신석
	시설운영팀장		김선호
	주무관		구본천

2021년도

장기사용 배급수관 정비사업 추진계획

2021. 1. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

2021년도 장기사용 배급수관 정비사업 추진계획

2세대 녹이 없는 수도관 중 관내부의 도장재 탈락 등으로 수질사고 위험이 높은 배급수관을 정비하여 깨끗하고 건강한 아리수를 공급하고자 함.

□ 근 거

○ 누수방지과-9506(‘20.12.28.) 2021년 장기사용 배급수관 정비계획

□ 추진개요

○ 정비목표 : 2.7㎞ (총 16㎞ - ’84~’85년 부설된 DCIP)

○ 총사업비 : 2,702백만원 (시설비 2,700, 시설부대비 2)

○ 사업기간 : 2021. 1. 1 ~ 12. 31.

○ 정비대상 : 덕타일주철관(시멘트라이닝, 무라이닝)

- 수질 및 누수사고 개연성이 높은 ’84~’85년 부설된 덕타일주철관

- 2세대 상수도관 중 급격한 노후화로 도장재가 탈락된 취약 상수도관

○ 정비 우선순위

- 1순위 : 녹물 및 이물질 출수 등 민원발생 구간

- 2순위 : 누수 다발구간

- 3순위 : 서울형 도시 재생 활성화 지역

□ ‘20년 추진실적(목표: 2㎞ / 실적:3.13㎞, 156%)

(단위:m)

구 분	계	단위공사 (80~300㎜)	연간단가 (80~300㎜)	비고
계	3,132	2,077	1,055
급수운영과	1,991	1056	935
시설관리과	1,141	1021	120

□ ‘21년 추진 계획

○ 정비목표 : 2,700m                         (단위:m, 백만원)

구분 구별	계		단위사업(90%이상)			연간단가(10%이내)
	연장	사업비	건	연장	사업비	연장	사업비
계	2,700	2,700	18개소	2,598	2,600	102	100
금천구	233	233	2	233	234
관악구	1,123	1,123	6	1,071	1,072	52	50
동작구	700	700	4	700	700
영등포구	644	644	6	594	594	50	50

※ 급수공사 시행중 발견되는 취약관로 긴급 정비 : 100백만원

□ 공사 방법

○ 단위사업 발주 및 연간단가 사업으로 시행

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 2건		80～350	2,598	2,600
1	독산동1071-2~1071-31 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사	80~300	1,304	1,300
2	사당동1032-1~1040-1 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사	80~200	1,294	1,300

□ 단위사업 발주 일정

○ 설계도서 작성 : ’21. 1. 31.(본부 도면 심사일 : ’21. 1. 12.)

○ 계약심사 및 발주 : ’21. 2.

- 본부 일위대가 작성 및 배포 후 심사 가능

○ 계약 및 착공 : ’21. 3.

○ 공사준공 : ’21. 11.

□ 행정사항

○ 설계도면 심사 (수도사업소 ⇒ 누수방지과)

○ 계약심사 (수도사업소 ⇒ 본청 계약심사과)

○ 사업발주 및 계약 (수도사업소 ⇒ 본청 재무과)

○ 매월 정비실적 본부 보고

따로붙임 1) 2021년 장기사용 배급수관정비공사 단위사업 카드 2부.

2) 현장조사 결과보고서 2부.  끝.