문서번호	기전과-351
결재일자	2021. 1. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
정영권	김승곤	01/12 배수웅

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「고덕3단지아파트 주택재건축 교통안전시설물(표지) 설치공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 1. 12.

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「고덕3단지아파트 주택재건축 교통안전시설물(표지) 설치공사」

고덕3단지아파트 주택재건축 교통안전시설물(표지) 설치공사

원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 고덕3단지아파트 주택재건축 교통안전시설물(표지) 설치공사

○ 공사위치 : 강동구 고덕로 359 일대

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2020. 12. 31.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	원인자	설계	감리	시공사
표 지	******** ***********	*****	*****	*****

□ 검토내용

○ 규제심의 : 서울지방경찰청 교통관리과-23817호(2020.11.19.)

○ 변경사항 : 교통안전표지 55매 → 9매

○ 변경사유 : 규제 변경으로 인한 물량 변경

□ 검토의견

○ 고덕3단지아파트주택재건축정비사업조합에서 시행하는 고덕3단지아파트 주택재건축 교통안전시설물(표지) 설치공사 원인자부담공사 설계변경 요청에 대하여 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인처리하고자 합니다.

붙임  1. 서울지방경찰청 규제심의 공문 사본 1부.

2. 기술검토의견서 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 설계도면 1부.

5. 원인자부담공사 변경승인 요청 공문 1부.  끝.