투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	(2차) 계약변경 및 (3차) 계약시행 의뢰 (시립마포 실버케어센터 건립공사)

1.

건축부-481(2021.1.12.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『시립마포 실버케어센터 건립공사』와 관련하여 아래와 같이 2차공사 계약변경 및 3차공사 계약시행 의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 시립마포 실버케어센터 건립공사 (창업허브단지 조경공사 포함)

나. 계 약 자 : 혁성공영㈜ 외 1개사

다. 변경내용 : 2차 계약변경, 3차 계약시행

구 분	차수	당 초	변 경	증 감
계약 금액	2차	3,650,000,000	3,650,000,000	시공물량 조정
	3차	9,093,549,000	9,093,549,000	금회 계약 요청
	총차	16,316,549,000	16,316,549,000	변경없음
계약 기간	2차	‘20.07.21. ~ ’21.01.15.	‘20.07.21. ~ ’21.01.15.	변경없음
	3차	‘21.01.16. ~ ’21.12.14.	‘21.01.16. ~ ’21.12.14.
	총차	‘19.04.15. ~ ’21.12.14.	‘19.04.15. ~ ’21.12.14.

라. 변경사유 : 2차 및 3차계약 시공물량 조정으로 변경

붙 임 : 1)(2차)계약변경 및 (3차)계약시행 검토 보고서 1부.

2)건설사업관리단 계약요청 검토보고 1부.   끝.

	건축부장
주무관	김재호		의료시설과장	차무흥		건축부장	01/12 이창구
협조자
시행	건축부-494	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2616	/전송	02-3708-2659	/		/	부분공개(5)