문서번호	공원시설과-249
결재일자	2021. 1. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		공원시설과장		공원부장
박정원		최연호		01/12 김상국
협 조

-잠실한강공원 자연형물놀이장 조성 실시설계용역- 추가과업에 따른 과업변경 검토 보고

2021. 1.

공  원  부

(공원시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성 실시설계용역 -

추가과업에 따른 과업변경 검토 보고

「잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성 실시설계용역」추진 중 지하매설물조사 등 추가과업 사항에 대한 과업변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성 실시설계용역

○ 용역기간 : 2020. 6. 17. ~  2021. 5. 31.

○ 용 역 비 : **********

○ 용역업체 : ***********************

□ 추진현황

○ ’20. 1.30  : 추진계획 방침 수립 (행정제2부시장19호)

○ ’20. 3.23. : 설계공모 공고(서울시 공모 웹페이지 http://project.seoul.go.kr)

○ ’20. 5.20. : 작품접수 완료(총 11개-국내9 해외2)

○ ’20. 6. 3. : 당선작 선정 “Wonderful Land”(㈜동심원조경 대표 안계동)

○ ’20. 6.17. : 실시설계 용역 착수

○ ’20. 7.23. : 착수보고

○ ’20.12.24. : 설계경제성심의(VE) 완료

□ 변경내용

○ 추진근거

- 지하매설물 조사(시험굴착) 검토 보고(공원시설과-2838호,’20.8.3.)

- 측량 및 지반조사 추가과업 검토 보고(공원시설과-3199호,’20.8.27.)

○ 변경내용

구 분	금 액	비 고
지하매설물 조사(시험굴착)	********
측량 및 지반조사	********
합 계	********

- 계약금액 : *******************************

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 잠실 자연형 물놀이장 조성, 시설비

□ 조치계획

○ 위와 같이 「잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성 실시설계용역」 추가과업에 대하여, 21년도 예산을 활용하여 과업변경 시행 후 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 향후계획

○ ’21. 1.          : 과업변경 계약 의뢰(총무과)

○ ’21. 1. ~ 6.  : 건설기술심의, 특정기술선정심사, 좋은빛심의, 등 사전절차 이행

○ ’21. 7.         : 공사착공

○ ’23. 5.         : 공사완료

○ ’23. 6.         : 물놀이장 개장

붙임 1. 지하매설물 조사(시험굴착) 검토 보고 1부.

2. 측량 및 지반조사 추가과업 검토 보고 1부.  끝.