문서번호	건축부-481
결재일자	2021. 1. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		의료시설과장	건축부장
김재호		차무흥	01/12 이창구
협 조

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

(2차)계약변경 및 (3차)계약시행 검토보고

2021. 1.

도시기반시설본부

(건축부)

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

(2차)계약변경 및 (3차)계약시행 검토보고

『시립마포 실버케어센터 건립공사』 관련 ***************************** 검토보고가 건설사업관리단으로부터 제출되어 검토보고 드림.

1		사업개요

위    치 : 서울특별시 마포구 백범로 21 (舊, 한국산업인력관리공단 )

규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 12,271㎡

(서을창업허브단지 조경공사 포함)

용    도 : 노유자시설(노인복지시설)

공사기간 : (2차)‘20.07.21. ~ ’21.01.15. (3차:‘21.1.16. ~ ’21.12.14.)

공 사 비: (2차)금3,573,000,000원 (3차:금9,093,549,000원)

시 공 사 : 혁성공영㈜, ㈜태왕이앤씨

감 리 사: ㈜유탑엔지니어링건축사사무소, ㈜아이티엠코퍼레이션건축사사무소

2		추 진 경 위

‘19. 04. 05.  : 공사계약 체결

‘19. 04. 15.  : 공사착공

‘19. 07. 25.  : 지상 지장물(기존건물 등) 철거

‘19. 10. 15.  : 지하 지장물(우오수 관로, 통신선로 등) 철거 및 이설

‘20. 05. 20.  : 토공사 완료

‘20. 07. 20.  : 1차 공사 준공

‘21. 01. 현재  : 지상3층 벽체 골조공사 등

3		계약 변경 및 시행 검토보고

관련근거

○ ********************************************************

2차공사 계약변경 사유: 시공물량 조정

○ 건축공사 :철근콘크리트공사 물량 증, 방수공사 이월  등

○ 토목공사 : H-Pile 인발 시공물량 이월 등

○ 제경비 (국민건강보험료, 노인장기요양보험 등) 실 집행분 정산 반영

2차 계약변경 및 3차 계약시행 내용

구 분	차수	당 초	변 경	증감
계약금액	2차	3,650,000,000	3,650,000,000	시공물량조정
	3차	9,093,549,000	9,093,549,000	금회 계약요청
	총차	16,316,549,000	16,316,549,000	변경없음
계약기간	2차	‘20.07.21. ~ ’21.01.15.	‘20.07.21. ~ ’21.01.15.	변경없음
	3차	‘21.01.16. ~ ’21.12.14.	‘21.01.16. ~ ’21.12.14.
	총차	‘19.04.15. ~ ’21.12.14.	‘19.04.15. ~ ’21.12.14.

4		감리자 검토의견

혁성공영(주)에서 제출한 2차분 계약변경 및 3차분 공사계약 요청의 건에 대하여 검토하여 본 결과, 2차분 계약변경 내역조정 및 3차분 계약요청 내역이 적정한 것으로 사료됨.

5		처리의견

책임건설사업관리자의 검토의견에 따라 2차공사 계약변경 및 3차공사 시행에 대하여 계약부서(총무부)에 계약체결 의뢰하고자 함.

붙임 : 2차분 계약변경 및 3차분 공사계약 요청 검토보고서(건설사업관리단) 1부.  끝.